무한상상실 개설ㆍ운영
사업관리 매뉴얼

2020. 08.

한국과학창의재단

	목 차

Ⅰ. 사업의 기획, 추진 및 성과관리	1

1.1 사업 개요	2

1.2 사업 추진절차	3

1.3 사업 성과관리	4

Ⅱ. 운영기관 선정, 관리 및 성과평가	5

2.1. 운영기관 선정	6

2.2 운영기관 관리	10

2.3 운영기관 성과평가	13

Ⅲ. 사업비 집행, 정산 및 장비관리	22

3.1 사업비 사용 및 관리 원칙	23

3.2 사업비 편성 및 집행 기준	27

3.3 사업비 및 인력변경	33

3.4 사업장비 등의 관리	34

부록. 주요서식	37

1. 무한상상실 운영기관 협약서	38

2. 사업 신청서	40

3. 사업계획 변경요청서	41

4. 사업비 집행증빙서식	44

5. 자체평가보고서, 회계감사검증보고서 등	48

6. 고객 만족도 조사지	62

Ⅰ. 사업의 기획, 추진 및 성과관리

	1.1. 사업 개요 1.2. 사업 추진절차 1.3. 사업 성과관리

1.1 사업 개요

1.1.1 사업개요

◦ 시민 누구나 각자의 관심사에 따라 과학 기술을 만나고 이해하며, 참여를 통해 문화로 수용하는 개방형 공간인 무한상상실을 개설ㆍ운영하여 과학기술문화 확산에 기여

1.1.2 사업근거

◦ 과학기술기본법 제30조(과학기술문화의 창달 및 창의적 인재육성)

1.1.3 주요연혁

연 도	주 요 내 용
2013	⦁국민의 상상력‧창의력 발굴‧관리‧활용 체계 구축방안 연구(’13.6.) ⦁무한상상실 시범운영기관 6개 선정(’13.6.) ⦁무한상상실 종합정보시스템 『무한상상정보넷』 오픈(’13.12.)
2014	⦁신규 무한상상실 운영기관 35개 선정, 총 43개소 운영
2015	⦁전국 무한상상실 58개소 운영
2016	⦁전국 무한상상실 56개소 운영(‘16.3.)
2017	⦁무한상상실 운영기관 21개소로 재편되어 공방형으로 운영(’17.1.) ⦁무한상상실 중장기 발전전략 수립 연구(’17.2.)
2018	⦁전국 무한상상실 21개소 운영(‘18.2.)
2019	⦁전국 무한상상실 21개소 및 활성화 지원 추가 과제 운영(’19.2.)

1.2 추진절차

1.2.1 추진절차

시행 계획 수립	⦁ 과학기술정보통신부 ⦁ 과학기술정보통신부-재단 협약 체결
▼
사업 공모	⦁ 과학기술정보통신부 : 공고(안) 확정 ⦁ 공고(과기정통부 및 재단 홈페이지)
▼
운영기관 선정	⦁ 평가위원회에서 운영기관 선정평가 및 선정
▼
협약 체결	⦁ 한국과학창의재단-운영기관 협약 체결
▼
사업비 지급	⦁ 한국과학창의재단 → 운영기관
▼
사업 관리	⦁ 현장점검 및 컨설팅 실시 ⦁ 운영기관 협의회 운영(2∼3회)
▼
최종 평가	⦁ 운영기관 연말 최종평가(100%) 실시
▼
성 과 관 리	⦁ 우수사례 발굴, 사례집 발간, 홍보

1.3 성과관리

1.3.1 성과관리 개요

◦ 무한상상실 개설ㆍ운영 사업은 기재부 공공기관 경영성과평가(사업) 관련 4개와 과기부 주무과 성과지표 4개로 구성되어 있으며, 매년 관련 기관과의 협의를 통해 성과지표와 목표치의 조정이 필요함

◦ 정량 성과지표로 구성되어 있고, 무한상상정보넷을 통해 상시 관리

1.3.2 성과지표

구분	평가지표	설명	산출	비고
경평	과학문화격차해소	소외지역ㆍ계층 대상 이동형 무한상상실 참가자 수	전년도 대비 10% 증
경평	과학소통전문가 양성	무한상상실 참여(소속) 강사 수	목표대비 실적
경평	창작문화 활성화	무한상상실 정기 및 상시 프로그램 참가자 수	3개년 표준편차
과기부	무한상상실 이용자 수	무한상상실 정기 및 상시 프로그램 참여자 수	목표대비 실적
과기부	평균 아이디어 구현 건 수	무한상상실을 통해 구현한 아이디어 구현 건 수의 기관 당 평균	목표대비 실적
과기부	무한상상실 정기 프로그램 수	무한상상실의 정기프로그램 수의 기관 평균	목표대비 실적
과기부	무한상상실 이용자 만족도	무한상상실 정기 및 상시 프로그램 이용자 만족도의 기관 평균	목표대비 실적	부록 참조

Ⅱ. 운영기관 선정, 관리 및 성과평가

	2.1 운영기관 선정 2.2 운영기관 관리 2.3 운영기관 성과평가

2.1 운영기관 선정

2.1.1 운영기관 기본요건

◦ 지역 거점형 무한상상실은 아래의 요건을 구비하여야 함

구분	최소요건
공간	□ 400㎡ 이상의 전용공간 □ 400㎡ 중 300㎡는 전용 공작 공간
장비	□ 디지털 공작 장비 3종 이상, 최소 10대 이상 구비 (3D프린터, 3D스캐너, 레이저커터, CNC 장비 등)
인력	□ 상주 전담 인력 3인 이상 □ 위 3인 중 2인 이상은 보유 장비 관리 및 기술지원 인력 ※ 사업비로 인건비는 집행 불가, 전문가 활용은 가능

◦ 공간 상시 운영

-  무한상상실의 장비ㆍ공간을 이용하고자 하는 국민들에게 장비 목록과 예약 날짜 등을 사전에 공개하고 신청을 받아 사용토록 운영함

-  각 기관은 사용자에게 기본적인 장비사용 기초교육과 안전교육을 실시하고 이용 등급을 부여하여 안전하게 이용토록 유도함

◦ 교육 프로그램 운영

구분	내용	프로그램 예시
4차 산업혁명형 제작	보급형 또는 이동형 장비를 활용한 기본원리 교육 및 체험을 통한 아이디어 구현ㆍ제작 활동	3D펜ㆍ프린터, 레이저커터, VRㆍAR 제작 등
4차 산업혁명형 교육	급변하는 과학기술 패러다임에 대응하여 아이디어 구현을 위한 고급 이론 및 심화 교육 활동	코딩, 아두이노, 파이썬, SW, 드론, 로봇 교육 등
과학기술 기반 실험	흥미 위주의 과학기술 기반 실험과 함께 숨겨진 과학적 이론ㆍ원리 등을 학습하는 체험 활동	생물학 실험(미생물 배양 등)을 통한 그림 그리기 등
과학기술 복합 공간	위 제시된 교육 프로그램 이외에 시민 참여형 상시 개방 과학기술 체험ㆍ문화 공간으로 활용	사회문제 해결형 R&SD, 과학기술인 강연 및 공연 등

2.1.2 운영기관 선정기준

◦ 선정 요건(‘14년도 기준)

구분	거점 무한상상실	소규모 무한상상실
운영 인력	· 상근 인력 최소 3인 이상(코디네이터, 관리인력, 전문가 등)	· 상근 인력 최소 1인 이상(코디네이터, 관리인력, 전문가 등)
설치 공간	· 400[eqn: m ^{2}](공작실 300[eqn: m ^{2}] + 아이디어회의실 100[eqn: m ^{2}])	· 200[eqn: m ^{2}](공작실 100[eqn: m ^{2}] + 아이디어회의실 100[eqn: m ^{2}]) · 주요 시설(장비, 스크린 등) 자체 구비
기타 준비 사항	· 임대 공간을 활용할 경우 설치 공간 임대비 및 상주인력 인건비 확보 · 전문 인력 수급을 위한 지역 대학교, 교육청 등과 협력 네트워크 확보 · 지역별 차별화된 프로그램 운영을 위한 프로그램 개발 계획 등

◦ 선정 분야(’14년도 기준)

※ 단, ’20년도에는 ❶ 시민 과학기술 실험실형 하나로 통합하여 선정함

❶ 시민 과학기술 실험실형

아이디어 발굴		교육ㆍ제작		실험ㆍ체험		성과 창출
과학기술 기반 아이디어 발굴		운영기관별 교육 및 제작 프로그램 개발ㆍ운영		인프라를 활용한 과학 기술 실험ㆍ 체험 프로그램 운영		지속 운영을 통한 과학 기술문화 저변 확대

※ (추가과제) 창작 커뮤니티 운영

창작 커뮤니티 선정		창작 커뮤니티 구성		실험ㆍ연구		성과 창출
전국 무한상상실 운영기관 중 최대 10개관 선정		운영기관별 창작 커뮤니티 구성 및 ‘로컬 프로젝트’ 수행		무한상상실 인프라를 활용한 지역이슈 및 문제해결 실험ㆍ연구		연구 성과 발표 및 해당 지자체 및 연구 기관과의 협업을 통한 지속적 문제해결

❷ 스토리텔링형

스토리텔링클럽조직		동호회 활동		창작		성과창출
▪스토리텔링 참여자 모집 ▪일반인, 아마추어 작가 등		▪독서토론 ▪스토리텔링 교육 등		▪협업, 공동창작 ▪과학스토리, SF 시놉시스, 미래 시나리오 등 창작		▪과학스토리도서발간 ▪UCC 제작 등

❸ 아이디어클럽형

· R&D 연계 아이디어클럽형 모델

아이디어 발굴		출연연 등 멘토링		실험·연구		성과창출
▪연구개발, 기술 아이디어 모집 ▪연구개발 연계 가능 아이디어 선정		▪연구개발 유형별로 유관 연구기관 전문가와 매칭 ▪아이디어 개발·구체화를 위한 지도, 멘토링		▪출연연, 중앙과학관 시설을 활용한 실험, 제작 ▪팀별 또는 1:1지도를 통한 연구		▪연구결과 발표 ▪출연연의 연구개발 과제화

· 청년아이디어클럽형 모델

아이디어 모집		아이디어 활동		사업화 멘토링		성과창출
▪대학생 아이디어 공모 ▪우수아이디어 선정 과제지원		▪팀별 아이디어 창출활동		▪아이디어 중간발표 및 전문가 멘토링 ▪사업화, 창업, 특허출원 지원을 위한 교육		▪아이디어 특허출원 ▪아이디어 기반 창업

2.1.3 선정평가지표

구분	평가 요소	배점
Ⅰ. 기관 역량의 우수성	◦ [사업 이해도] - 무한상상실에 대한 사업 이해 및 취지와의 부합성 ◦ [기관 역량] - 기관의 신뢰도, 기관장의 의지(※기관장 확인서 등 별첨) - 기관과 사업 책임자의 사업 수행 능력 - 무한상상실 운영 관련 조직 및 인원의 적절성 - 사업 추진체계	30
Ⅱ. 사업 인프라의 적합성	◦ [입지] 운영을 위한 공간의 접근성 ◦ [공간] 운영을 위한 전용 및 병행 공간 확보 여부 ◦ [매칭자금] 지자체 및 자체 매칭 자금 확보 여부	20
Ⅲ. 사업 계획의 적절성	◦ [사업 계획] - 사업 계획의 구체성 - 지역 특화 및 사업영역 차별화 - 지자체, 지역 기업, 언론 등과 협력 및 홍보 - 운영 프로그램 실행 가능성 - 예산집행 세부계획 ◦ [사업 관리] - 자체 모니터링, 과정관리, 산출물 활용 방안 - 추진 일정 및 인력 계획 - 기대 효과, 성과환류 계획 등	50
합 계		100

참고	계속 운영기관 지정

	▷ ‘16년도부터 신규 공모 자제, 기존 기관의 정리와 함께 계속 운영기관을 지정하여 운영 중(21개 기관)

2.1.4 역대 운영기관 현황

기관명	유형	예산(천원)
		2015(58기관)	2016(56기관)	2017(21기관)	2018(21기관)	2019(21기관)
광진정보도서관	소규모	42,000	43,000	-	-	-
한국발명진흥회	소규모	36,000	-	-	-	-
서울서초3동우체국	소규모	자체예산	-	-	-	-
서울테크노파크	소규모	36,000	29,000	-	-	-
강서구평생학습관	소규모	36,000	29,000	-	-	-
부산인재평생교육개발원	거점	150,000	180,000	120,000	150,000	170,000
동의대학교	소규모	36,000	29,000	-	-	-
부산시립시민도서관	소규모	36,000	43,000	-	-	-
국립대구과학관	거점	자체예산	자체예산	자체예산	자체예산	15,000
수성구립 범어도서관	소규모	36,000	36,000	-	-	-
인천대학교	거점	150,000	180,000	150,000	120,000	120,000
율목도서관	소규모	36,000	36,000	-	-	-
인천어린이과학관	소규모	36,000	43,000	-	-	-
국립광주과학관	거점	자체예산	자체예산	자체예산	자체예산	15,000
신창동주민센터	소규모	-	-	-	-	-
광주사회경제지원네트워크	소규모	36,000	29,000	-	-	-
바림미디어스페이스	소규모	36,000	43,000	60,000	60,000	60,000
국립중앙과학관	거점	자체예산	자체예산	자체예산	자체예산	자체예산
대전교육과학연구원	소규모	42,000	29,000	-	-	-
세종종합사회복지관	소규모	36,000	36,000	-	-	-
국립과천과학관	거점	자체예산	자체예산	자체예산	자체예산	자체예산
경기테크노파크	거점	150,000	180,000	150,000	120,000	150,000
한국만화영상진흥원	소규모	36,000	36,000	-	-	-
강원지식재산센터	거점	자체예산	자체예산	자체예산	자체예산	50,000
강원도농산물원종장	소규모	36,000	43,000	60,000	60,000	90,000
청주기적의도서관	소규모	36,000	29,000	-	-	-
제천기적의도서관	소규모	36,000	29,000	-	-	-
호서대학교	거점	36,000	150,000	-	-	-
계룡산자연사박물관	소규모	36,000	29,000	-	-	-
당진도서관	소규모	36,000	36,000	-	-	-
우정공무원교육원	소규모	자체예산	36,000	60,000	60,000	60,000
전북대학교	거점	150,000	120,000	-	-	-
남원교육문화회관	소규모	36,000	-	-	-	-
전남정보문화산업진흥원	거점	150,000	150,000	-	-	-
목포공공도서관	소규모	36,000	36,000	-	-	-
순천대학교	소규모	36,000	29,000	-	-	-
동양대학교	소규모	36,000	36,000	-	-	-
포항시 청소년수련관	소규모	-	-	-	-	-
창원과학체험관	거점	170,000	180,000	120,000	150,000	160,000
경상대학교	소규모	36,000	29,000	-	-	-
영산대학교	소규모	36,000	29,000	-	-	-
제주항공우주박물관	거점	150,000	150,000	-	-	-
제주대학교	소규모	42,000	29,000	-	-	-
국립현대미술관	거점	170,000	150,000	150,000	120,000	-
금천구청	거점	170,000	150,000	150,000	150,000	150,000
서대문구이진아기념도서관	소규모	27,000	36,000	-	-	-
부산시립중앙도서관	소규모	27,000	36,000	-	-	-
달서어린이도서관	소규모	27,000	36,000	-	-	-
인천광역시교육과학연구원	소규모	27,000	36,000	-	-	-
광주북구문화의집	소규모	27,000	36,000	-	-	-
울산과학관	거점	170,000	150,000	120,000	120,000	120,000
의정부과학도서관	소규모	27,000	-	-	-	-
영월미디어기자박물관	소규모	27,000	36,000	-	-	-
한국교통대학교	거점	170,000	150,000	180,000	150,000	170,000
천안시쌍용도서관	소규모	27,000	36,000	-	-	-
완주군 창업보육센터	소규모	27,000	36,000	60,000	120,000	80,000
광양시문예도서관사업소	소규모	27,000	36,000	-	-	-
김천녹색미래과학관	거점	170,000	150,000	120,000	150,000	120,000
포항공과대학교	거점	170,000	150,000	150,000	120,000	170,000
공군교육사령부	소규모	27,000	36,000	60,000	60,000	60,000
국립부산과학관	거점	-	50,000	자체예산	자체예산	15,000
로봇스퀘어	소규모	-	-	-	-	75,000
합계		3,377,000	3,451,000	1,710,000	1,710,000	1,850,000

2.2 운영기관 관리

2.2.1 운영예산 배분기준

※ 연도별 예산에 따라 기본지원금 및 추가지원금 규모는 변동될 수 있음

◦ (기본지원예산) 운영을 위한 기본예산은 아래의 기준 따라 지원하며 선정(연차)평가 등을 통해 조정할 수 있음(‘14년도 기준)

구분	설명	지원금
‘가’급	총공간 1,000㎡이상 이며, 전용공간 400㎡이상이고 전담인력 3인 이상인 기관	120백만원 내외
‘나’급	총공간 1,000㎡이상 이며, 전용공간 400㎡이상 이거나 전담인력 3인 이상인 기관	100백만원 내외
‘다’급	총공간 1,000㎡미만이고, 전용공간 400㎡이상이거나 전담인력 3인 이상인 기관	80백만원 내외
‘라’급	총공간 400㎡미만이고(전용공간은 100㎡이어야 함) 전담인력 3인 미만인 기관	60백만원 내외

참고	무한상상실 총 공간 정의

▷ 무한상상실 총 공간은 전용공간과 병행공간으로 구분한다.

구분	설명
전용공간	▸ 무한상상실 전용 공작공간(가공실, 목공공작실 등)만 해당
병행공간	▸이론 교육실, 컴퓨터 교육실 등 무한상상실 참여자 교육 공간 ▸회의실, 커뮤니티룸 등 무한상상실 참여자 네트워킹 공간 ▸운영사무실, 창작물 전시공간 등 무한상상실 운영지원 공간 ※ 단, 기관 공용공간(체육관, 화장실, 탕비실, 카페, 세미나실) 및 옥외교육장, 행사장 등은 제외

◦ (추가지원금) 기본 지원금 외 추가 지원금은 아래의 기준에 따라 심의하여 차등 배분함

추가과제	설명	지원금
이동형 무한상상실	「도서벽지교육진흥법」 상의 도서벽지 학교와 소외계층ㆍ지역 대상의 찾아가는 방식의 ‘이동형 무한상상실’ 운영 계획평가를 통해 최대 6개 운영기관 선정	30백만원 내외
창작 커뮤니티 육성	지역별 창작 커뮤니티 구성 및 커뮤니티 주도의 지역 현안 해결을 위한 ‘로컬 프로젝트’ 과제 최대 2건 지원 지역 편중 방지를 위한 지역별 최대 10개 운영기관 선정	10∼20백만원 내외

참고	지난 4개년 운영예산

	▷ 평균 투입예산은 1,763백만원(기관당 117.5백만원)으로 이중 장비재료비가 45%, 전문가활용비가 24% 등 대부분의 예산이 장비유지와 전문가활용(강사)에 투입됨

<무한상상실 4개년 투입예산 분석>

											단위 : 백만원, %
		구분	2015년		2016년		2017년		2018년		4개년 평균
			예산	비율	예산	비율	예산	비율	예산	비율	예산	비율
		전체예산	1,766	100%	1,864	100%	1,710	100%	1,710	100%	1,763	100%
		장비및재료비	1,042	59%	698	37%	714	42%	706	42%	791	44.9%
		장비비	909	51%	469	25%	465	27%	456	27%	575	32.6%
		재료비	136	8%	229	12%	249	15%	250	15%	216	12.3%
		사업활동비	349	20%	572	31%	523	30%	567	33%	503	28.6%
		전문가활용비	294	17%	442	24%	447	26%	517	30%	425	24.1%
		행사개최비	55	3%	130	7%	76	4%	50	3%	78	4.4%
		홍보비	6	0%	19	1%	14	1%	36	2%	19	1.1%
		사업추진비	178	10%	327	18%	224	13%	218	13%	237	13.4%
		위탁사업비	53	3%	125	7%	113	7%	73	4%	91	5.2%
		사업수당	30	2%	31	2%	29	2%	21	1%	28	1.6%
		간접비	104	6%	93	5%	94	6%	88	5%	95	5.4%

2.2.2 기본 성과관리

◦ 무한상상정보넷을 통해 아래의 성과관리 항목을 기관별로 관리하여야 함

분류	항목	세부 내용	입력 주기
기본 현황	공간	공간명, 면적, 용도설명, 전용공간여부	년
	운영인력	소속, 직급, 업무분장, 근무형태, 자격증, 연락처	년
	강사	이름, 소속, 직업, 연락처, 거주지	년
	보유장비	장비명, 제조사, 제조국, 가격, 장비설명, 구입일, 상태	년
참여자 수	정기 프로그램 참여자 수	정기 프로그램1)에 참여한 수혜자 수	월
	상시 프로그램 참여자 수	정기 프로그램 이외의 장비 활용, 관람 등 프로그램에 참여한 수혜자 수	월
	행사 참여자 수	메이커 행사/전시에 참여한 수혜자 수	월
창작물	창작물 수	무한상상실 프로그램을 통해 만들어진 창작물 수	월
장비	장비 사용일 수	-	월
	장비사용률	-	월
프로그램	정기 프로그램	유형, 프로그램명, 운영목적, 운영기간, 대상, 참여자 수, 창작물 수	월
	상시 프로그램	유형, 프로그램명, 운영목적, 운영기간, 대상, 참여자 수, 창작물 수	월
	행사	유형, 행사명, 운영목적, 주관/후원기관명, 장소, 운영기간, 집계방법, 참여자 수, 창작물 수	월
무한상상실 운영	실제 운영일 수	-	월
특이성과	지식재산화 (특허출원, 특허등록, 실용신안, 상표권, 디자인권, 기타)	출원/등록인, 출원/등록일, 출원/등록번호, 명칭, 무한상상실 참여 프로그램	년
	일자리 연계 (창업, 강사양성)	창업자, 창업일, 창업아이템명, 기업명, 사업자번호, 유관협력기관, 무한상상실 참여프로그램	년
		강사명, 강사양성프로그램명, 프로그램 이수 일자, 양성된 강사가 강의중인 프로그램명, 활동기간	년
	우수 시제품 제작 (공모전, 행사전시, 시제품 판매, 기타)	행사명칭, 주관기관, 출품자, 출품작 명칭, 무한상상실 참여 프로그램	년
		완성품/시제품 구분, 제품명, 판매자, 판매처, 판매기간, 무한상상실 참여 프로그램	년

1) 정기프로그램 : 수혜자가 무한상상실에 방문하여 직접 참여하는 교육/체험/실습/공작 프로그램으로서 특히, 커리큘럼에 의해 특정 기간 동안 정기적으로 운영하는 프로그램

2.2.3 무한상상실 협의회 운영

◦ (목적) 전국 무한상상실 운영기관의 원활한 소통과 협력을 위해 전국 협의회 및 지역협의회 운영

◦ (구성) 전국협의회와 지역협의회로 구성하여 운영

구분	주요 내용
전국협의회 (연 3회)	□ (참가기관) 전국 무한상상실 운영기관 □ (주요내용) - 재단(과기정통부) 정책 안내, 운영 상 협조 요청사항 안내 - 기관 간 협력사항 논의, 노하우 공유 등
지역협의회 (상시, 필요시)	수도 (5개)	금천구청, 과천과학관, 중앙과학관, 인천대학교, 경기테크노파크
	중부 (6개)	한국교통대학교, 강원지식재산센터, 강원도농산물원종장, 완주군창업보육센터, 바림미디어스페이스, 광주과학관
	남부 (8개)	부산과학관, 공군교육사령부, 포항공과대학교, 대구과학관, 울산과학관, 부산인재평생교육진흥원, 창원체험과학관, 김천녹색미래과학관

◦ (지원) 지역협의회 운영을 위한 예산 지원ㆍ활성화 필요(’19년부터)

2.2.4 과학문화행사 연계

◦  재단 및 지역(지자체) 등과 연계한 각 지역별 우수 프로그램의 체험 행사

구분	주요내용	비고
대한민국과학창의축전 (대한민국과학축제)	□ 전시 및 체험프로그램 운영	필수
교육기부 박람회	□ 전시 부스 운영	-
SW교육 페스티벌	□ 전시 부스 운영	-

2.3 운영기관 성과평가

2.3.1 평가개요

- 1단계 평가 실시(최종평가 100%)

운영계획평가	→	현장점검ㆍ컨설팅	→	최종평가(100점)
‧사업계획 검토 및 보완요청 ‧우수사례 발굴		‧현장운영실태 확인 및 점검 ‧운영 애로사항 논의		‧운영실적 계량 평가 ‧사업성과 비계량 평가 ‧차년도 사업비 배분 연계
3∼4월		6∼7월		12월

참고	예산 미지원 운영기관 및 신규 운영기관 평가

▷ (예산 미지원 운영기관) 평가 면제, 최종성과 결과보고서 제출

▷ (신규 운영기관) 별도 평가체계로 적부 판단 진행(① 적합 판정 시 보통등급 부여
② 부적합 판정 시 개선계획 제출), 당해 연도 사업비 배분에는 결과를 반영하지 않음

지표명		설명	배점
	운영요건 세팅 여부	본격 운영을 위한 운영요건 세팅 여부	50점
	장소 및 장비	장소 및 장비 세팅 여부	25점
	운영인력	운영인력 세팅 여부	25점
사업계획 대비		초기 제출 사업계획 대비 보완ㆍ개선사항 검토	25점
홍보		온ㆍ오프라인 홍보 채널 이용 성과확산 검토	25점
합계			100점

2.3.2 운영평가지표

		지표명	지표설명	평가방법	배점	방식
		Ⅰ. 사업계획	성과목표의 적절성 및 계획의 구체성		-	운영계획평가
		1-1 공통 성과지표 계획	재단 공통 제시 성과지표에 대한 목표치 적절성	비계량	-
		1-2. 기관 성과지표 계획	운영기관이 자체적으로 제시하는 목표치의 합리성, 적절성	비계량	-
		1-3 목표 달성 계획	제시한 목표치 달성을 위한 계획의 구체성 등	비계량	-
		Ⅱ. 인프라	무한상상실 운영을 위한 인프라 평가		-	운영계획평가
		2-1 공간구성	운영을 위한 최소 공간 확보여부	계량	-
		2-2 장비구성	장비 보유수	계량	-
		2-3 인력구성	무한상상실 전담인력 수	계량	-
		Ⅲ. 사업수행	사업계획에 따른 수행과정 평가		50	최종평가
		3-1 프로그램	운영프로그램의 양적 질적 평가	비계량	20
		3-2 홍보	무한상상실 홍보 활동	비계량	10
		3-3 강사관리	강사 풀 구축 등 관리, 전문 인력 확보 등	비계량	15
		3-4 예산집행	계획대비 집행률	계량	5
		Ⅳ사업성과	성과목표의 달성 여부 평가		50	최종평가
		4-1 공통 성과지표 달성도	공통제시 성과지표 달성도	계량	20
		4-2 기관 성과지표 달성도	기관 제시 성과지표 달성도	계량	10
		4-3 지역연계 매칭	지자체 예산 등 매칭	비계량	5
		4-4 지역연계 활동	지역 연계 행사 개최, 참여 등	비계량	5
		4-5 우수사례창출	우수사례 발굴 성과	비계량	10

2.3.3 평가지표 세부기준

□ 사업계획

□-1 공통성과지표 계획

구분

내용

지표명

1.1. 공통성과지표 계획

지표정의

재단 공통 제시 성과지표에 대한 목표치의 합리성, 적절성, 도전성

평가방법

비계량

배점

5점

평가착안점

‣당해연도 성과 목표치를 비계량 평가하여 사업목적을 달성토록 유도

‣아래의 공통성과지표에 대한 성과목표치의 합리성, 적설정, 도전성을 정성적으로 평가

공통 성과지표	목표치	가중치
정기프로그램 이용자 수		30
상시프로그램 이용자 수		10
무한상상실 강사 수		20
정기프로그램 수		20
아이디어 구현건수		10
무한상상실 이용자 만족도		10

* 공통성과지표는 매년도 평가환경에 따라 변동 가능

증빙

당해연도 사업계획서

평가시기

선정평가 또는 중간평가

□-2 기관성과지표

구분

내용

지표명

1-2. 기관 성과지표 계획

지표정의

운영기관이 자체적으로 제시하는 목표치의 합리성 적절성 도전성

평가방법

비계량

배점

3점

평가착안점

‣운영기관이 제시하는 자체 성과지표를 평가하여 사업목적을 달성토록 유도

‣성과지표는 자체적으로 개발하여 제시하나 기관의 특성, 지역의 환경 등을 고려한 합리적이고 적절한 성과지표와 목표치를 제시하여야 함

기관 성과지표	목표치	가중치
지역 행사 개최 건수	2회	50
전국 대회 입상 건수	1회	50

증빙

당해연도 사업계획서

평가시기

선정평가 또는 중간평가

□-3 목표달성계획

구분	내용
지표명	1-3. 목표달성계획
지표정의	제시한 공통/기관 성과목표치를 달성하기 위한 계획의 구체성, 합리성
평가방법	비계량
배점	7점
평가착안점	‣당해연도 사업 목표 달성을 위한 전략, 전략과제의 적절성과 구체성 평가 ‣과제수행을 위한 인적구성, 예산배분의 적절성, 이행계획의 구체성 등을 평가
증빙	당해연도 사업계획서
평가시기	선정평가 또는 중간평가

□ 인프라

□-1 공간구성

구분

내용

지표명

2-1 공간구성

지표정의

무한상상실 운영을 위한 최소 공간 확보여부

평가방법

계량

배점

5점

평가착안점

‣무한상상실 운영을 위한 공간인 운영사무실, 체험교실, 공작실 등 필수공간만 포함하여 평가하고 카페, 전시장 등 공간은 제외

점수 산출식

‣점수 = 1점 + 4점 × 실적

* 실적 = (설치면적) / (400㎡)

* 실적은 1을 초과할수 없음

보조지표

‣다른용도의 공간과 분리된 무한상상실 전용공간 확보여부

기준	점수
무한상상실 전용 사용 300㎡ 이상	0
일부 공간 다른 용도로도 사용, 무한상상실 전용 200-300㎡ 미만,	-0.5
일부 공간 다른 용도로도 사용, 무한상상실 전용 100-200㎡ 미만,	-1.0
일부 공간 다른 용도로도 사용, 무한상상실 전용 100㎡ 미만,	-1.5
모든 공간 다른 용도로 병행 사용	-2.0

증빙

건축도면도, 건물등기부대장 등

평가시기

선정평가 및 현장실사

□-2 장비구성

구분

내용

지표명

2-2 장비구성

지표정의

무한상상실 운영을 위한 3D 프린터 등 전문 공작기기 보유 여부 평가

평가방법

계량

배점

4점

평가착안점

‣무한상상실 운영을 위한 디지털 공작장비 수와 관리상태를 평가.

‣목공, 봉제 장비가 있는 경우 동시 사용이 가능한 인원을 기준으로 장비수를 산정

‣전문 공작 활동과 연관성이 낮거나 기초 교육용 교보재는 제외(예. 컴퓨터 및 주변기기, 영상·음향 장비, 교육용 툴킷, 3D 펜 등)

점수 산출식

‣점수 = 1점 + 3점 × 실적

* 실적 = (보유장비종류) / (디지털공작장비 5종)

* 실적은 1을 초과할수 없음

보조지표

‣보유장비의 관리상태에 따른 감점

평가요소	배점
장비 정상 작동, 고장 또는 미사용 없음	0
장비 고장 또는 미사용이 보유수의 1/10 이하	-0.5
장비 고장 또는 미사용이 보유수의 1/10 초과	-1.0

‣시제품제작 장비 등 전문 장비 보유시 가점

평가요소	배점
시제품 제작용 전문공작기기(대형 3D 프린터 등)	1
제조용 전문 장비(목공, 가죽, IT 등)	0.5

증빙

장비관리대장(도입시기, 도입가 포함), 무한상상정보넷

평가시기

선정평가 및 현장실사

□-3 인력구성

구분

내용

지표명

2-3 인력구성

지표정의

무한상상실 운영을 위한 전담인력의 운영현황 평가

평가방법

계량

배점

6점

평가착안점

‣무한상상실 운영을 위한 운영인력 및 장비담당인력 등 전담 근무자 현황을 평가. 전담이 아닌 병행업무 인력은 제외하여 평가하여야 함

점수 산출식

‣점수 = 6점 × 실적

* 실적 = (전담인력수) / (3인)

* 실적은 1을 초과할수 없음

보조지표

‣인력구성에 따른 가감(가/감은 +-3점 이내)

평가요소	점수
전담인력 3인 초과 1인당 1점	1
장비전담 인력이 없는 경우	-1

* 보조지표에 의한 가점은 핵심지표 만점보다 초과 가능

증빙

사업계획서, 기본인적사항이 포함된 무한상상실 조직도, 재직증명서

평가시기

선정평가 및 현장실사

□ 사업수행

□-1 프로그램 (비계량 20점)

구분

내용

지표명

3-1 프로그램

지표정의

무한상상실 운영프로그램의 양적, 질적 수준에 대한 평가

평가방법

비계량

배점

20점

평가착안점

‣무한상상실의 사업 목적에 부합하는 내용으로 프로그램이 구성되었는지, 보유 프로그램의 질적 수준, 특화 프로그램의 지속적인 개발 등 운영 프로그램의 전반적인 평가

‣아래 평가요소를 참고하여 정성평가

평가요소	점수
무한상상실 사업목적에 적합한 프로그램이 충분히 운영되는지 여부	0~5
보유 프로그램의 전반적인 질적 수준	0~5
기관 성격에 맞는 특화 프로그램의 신규 개발 및 운영 여부	0~5
단계별 프로그램이 체계적으로 운영되는지 여부	0~3
보유 장비를 충분히 활용하는 프로그램의 보유 및 운영실적	0~2

* 각 평가요소별 점수는 0점에서 2점까지 0.4점 단위로 부여

증빙

무한상상정보넷 상 등록 프로그램, 프로그램 북, 최종보고서

평가시기

최종평가

□-2 홍보 (비계량 10점)

구분

내용

지표명

3-2 홍보

지표정의

무한상상실 브랜드 인지도 강화 위한 지역 내 홍보활동에 대한 평가

평가방법

비계량

배점

10점

평가착안점

‣무한상상실의 참여자수 확대 및 인지도 강화 등을 위한 보도자료 배포,  미디어 홍보, 유투브, SNS활동 등 종합적인 홍보 활동을 평가

‣아래 평가요소를 참고하여 정성평가

평가요소	점수
무한상상실 홍보를 위한 체계적인 연간 계획이 적절하게 수립되어 있는가	0~2
지역 내 학교, 메이커 관련 기관, 단체, 커뮤니티 등 대상의 홍보 활동을 하였는가	0~2
무한상상정보넷을 통한 프로그램의 홍보, 안내 등을 지속으로 수행하였는가	0~2
자체 SNS 등을 활용한 홍보를 지속적으로 수행하였는가	0~2
보도자료 배포, 매체활용 홍보 등의 실적이 있는가	0~2

* 각 평가요소별 점수는 0점에서 2점까지 0.4점 단위로 부여

증빙

사업계획서, 최종보고서 등

평가시기

최종평가

□-3 강사관리 (비계량 15점)

구분

내용

지표명

3-3 강사관리

지표정의

무한상상실 참여 강사에 대한 관리 평가

평가방법

비계량

배점

10점

평가착안점

‣강사 운영 현황에 대한 전반적인 평가로 자체적 강사 관리 풀의 구축, 외부 교류 통한 강사 공유, 전문 강사 발굴 실적 등을 평가

‣아래 평가요소에 대한 비계량 평가

평가요소	점수
전문 강사들의 지속적인 참여를 위한 관리계획의 수립 및 이행여부	0~5
자체적인 강사관리 시스템(DB)이 있고 운영을 하는가	0~2
분야별 전문 강사 발굴 노력 및 실적이 있는가	0~5
보유 강사 풀을 활용하여 타지역 무한상상실과 연계한 실적이 있는가	0~2
전문가 네트워크를 활용하는가	0~1

* 각 평가요소별 점수는 0점에서 2점까지 0.4점 단위로 부여

증빙

무한상상정보넷 상 등록 강사, 강사관리DB, 최종보고서 등

평가시기

현장실사, 최종평가

□-4 예산집행 (계량 5점)

구분	내용
지표명	3-4 예산집행
지표정의	정부 지원금의 집행률
평가방법	계량
배점	5점
평가착안점	‣분기별 예산 집행률을 평가
점수 산출식	‣점수 = 1 + 4점 × (계획대비 분기별 예산집행률 평균, %)
증빙	사업계획서, 최종보고서
평가시기	최종평가

□ 사업성과

□-1 공통성과지표 달성도 (계량 20점)

구분

내용

지표명

4-1 공통성과지표 달성도

지표정의

당해연도 공통성과지표 제시 목표치 대비 달성도

평가방법

계량

배점

20점

평가착안점

사업계획서 상 제시한 공통 성과지표 목표치 대비 달성도를 계량평가

점수 산출식

‣점수 = 20점 × (목표 달성도) / 100

‣목표달성도는 아래표를 통해 계량적으로 산출

공통 성과지표	목표치 (A)	실적치 (B)	달성비율 (C=B/A)	가중치 (D)	목표달성도 (E=C*D)
정기프로그램 이용자 수				30
상시프로그램 이용자 수				20
무한상상실 강사 수				20
정기프로그램 수				20
아이디어 구현건수				10
계				100	100

증빙

무한상상정보넷, 최종보고서

평가시기

최종평가

□-2 기관성과지표 달성도 (계량 10점)

구분

내용

지표명

4-1 기관성과지표 달성도

지표정의

당해연도 기관 제시 성과지표 제시 목표치 대비 달성도

평가방법

계량

배점

10점

평가착안점

사업계획서 상 제시한 기관 성과지표 목표치 대비 달성도를 계량평가

점수 산출식

‣점수 = 10점 × (목표 달성도) / 100

‣목표달성도는 아래표를 통해 계량적으로 산출

공통 성과지표	목표치 (A)	실적치 (B)	달성비율 (C=B/A)	가중치 (D)	목표달성도 (E=C*D)
지역 행사 개최 건수				50
전국 대회 입상 건수				50
계				100	100

증빙

무한상상정보넷, 최종보고서

평가시기

최종평가

□-3 지역연계 매칭 (계량 5점)

구분	내용
지표명	4-3 지역연계매칭
지표정의	무한상상실의 지자체 등의 예산 매칭
평가방법	비계량
배점	5점
평가착안점	무한상상실 운영 및 활성화를 위한 지자체 등의 예산 매칭 실적을 계량적으로 평가
점수 산출식	‣점수 = 1+ 4점 × 매칭비율(매칭예산 / 정부지원금) * 매칭비율이 1이 넘을 경우 1로 계산
증빙	매칭예산 제공기관 공문, 입금증 등
평가시기	최종평가

□-4 지역연계활동 (비계량 5점)

구분

내용

지표명

4-4 지역연계활동

지표정의

무한상상실의 지역 연계 사업 활동

평가방법

비계량

배점

5점

평가착안점

‣무한상상실의 특성화, 지역내 입지 강화를 위한 지역내 무한상상실 유관 활동을 평가

‣아래 평가요소에 대한 비계량 평가

평가요소	점수
지역 내 학교의 자유학기/학년제 등과의 연계 실적	0~1
메이커 유관 행사의 개최 실적(세미나, 포럼 등 포함)	0~1
지역 내 타기관 주관의 메이커 행사 등에 참여한 실적 및 노력	0~1
지자체, 공공기관 등과 연계한 메이커 유관 협업 실적 및 성과(행사제외)	0~1
지역 특성을 반영한 무한상상실만의 고유한 지역사회 기여 활동 및 성과(행사제외)	0~1

* 각 평가요소별 점수는 0점에서 1점까지 0.2점 단위로 부여

단, 2점 만점 평가요소는 0.4점 단위로 부여

증빙

최종보고서

평가시기

최종평가

□-5 우수사례창출 (비계량 10점)

구분

내용

지표명

4-4 우수사례창출

지표정의

우수사례, 특이성과 평가

평가방법

계량 + 비계량

배점

10점

평가착안점

‣무한상상실 사업을 통해 창출한 특허, 창업, 판매, 공모전 등 특이성과 및 우수사례에 대한 비계량 평가

‣아래 우수사례 평가요소에 대한 비계량 평가

평가요소	점수
우수사례가 무한상상실 사업목적에 부합하는가	0~2
우수사례가 무한상상실의 대표적 사례로 타기관에서 참고할 만한 성과인가	0~2
우수사례의 근거 자료가 충분한가	0~2
우수사례를 창출하기 위한 운영기관의 노력이 충분한가	0~2
지역의 특성을 반영한 우수한 사례인가	0~2

* 각 평가요소별 점수는 0점에서 1점까지 0.2점 단위로 부여

증빙

보도자료, 최종보고서 등

평가시기

중간평가, 최종평가

Ⅲ. 사업비 집행·관리 및 정산

	3.1 사업비 사용 및 관리 원칙 3.2 사업비 편성 및 집행 기준 3.3 사업비 및 인력변경 3.4 사업 장비 관리

3.1 사업비 사용 및 관리 원칙

※ ’21년도 무한상상실 개설ㆍ운영 사업 재원 변경에 따라 사업비 비목 변경(예정)

3.1.1 기본원칙

◦ 본 사업은 국가연구개발사업 법령 체계에 따른 사업비 집행 및 관리 절차를 준용함

3.1.2 관련용어

용 어		정 의
사업수행기관		사업을 주관하여 수행하는 기관
사업 책임자		사업수행기관에 소속된 임․직원으로 해당 기관의 지원사업에 총체적인 책임을 가지고 사업을 수행하는 자연인
회계검증 관련 부서장		사업수행기관의 재산상황과 업무집행을 감사하는 부서의 장 (감사 또는 검사역 등)
정 산		사업수행기관이 사용한 사업비 사용실적에 대하여 한국과학창의재단이 실시하는 일체의 회계검사 행위
집행 잔액	사용 잔액	사업수행기관이 협약기간동안 사업비를 사용한 후 남은 잔액
	정산 잔액	사업수행기관이 정산을 실시하고 확정한 금액
비 목		사업비 편성항목 중 직접비, 위탁사업비, 간접비
세 목		비목의 세부항목(예 : 인건비, 사업추진비, 사업활동비 등)
발생이자		사업비 집행 중에 사업비에서 발생한 이자

3.1.3 사업비 관리의 권한과 책임

◦  사업수행기관에 권한과 책임을 부여하여 사업비의 효율적 관리 도모해야 함

◦  사업비를 고의적으로 사업목적이외에 사용하는 등 지침을 위반할 경우 향후 사업의 참여를 제한(부적정 집행액에 대해서는 환수 조치)

3.1.4 사업비 사용 원칙

◦  (정확한 사업비 계상) 당초 사업계획서 작성 시 충분한 사전검토 후 필요 사업비를 계상하여 집행

◦  (사용내역의 합목적성) 사업비는 사업계획 및 목적에 맞게 집행되어야 함

◦  (사업기간 내 집행) 사업비는 협약기간 내에 집행해야 함

◦  (객관적 증빙자료 구비) 사업비 집행의 증빙은 객관적인 증빙서류(세금계산서, 품의서, 신용카드전표, 무통장 입금증 등)로 하며, 당해 과제 사업 종료일로부터 최소 5년간 보존되어야 함

[’20년도 과학기술진흥기금사업 운영관리지침] 제12조(사업비의 관리) ③-5

3.1.5 사업비 관리 원칙

◦  (사업비 관리계좌) 사업수행기관은 다른 용도의 자금과 분리하여 별도의 계정을 설정하고 관리해야 함

◦  (사업비 지출)  계좌이체 또는 법인카드로 지급해야 함

- 상기 계정과 연결된 체크카드를 발급 받아, 사업비 카드 사용신청서에 기재한 카드만 인정(개인 카드는 불인정)

◦  (법인카드 사용원칙) 소액도 법인 카드 사용을 원칙으로 함

- 다만 카드사용이 어려울 경우, 직접비 대비 2%범위 내에서 현금영수증 처리를 인정하고 있음

3.1.6 사업수행 증빙자료

◦  결의서 및 기타 지급, 구매, 회의 등의 내용을 증빙하는데 필요한 증빙서류를 구비 관리해야 함

◦  기본적으로 갖추어야 할 사업비 집행 증빙서류

구 분	증 빙 서 류
지출 등 결의서	지출결의서, 수입결의서
영수증서	카드매출전표, 세금계산서, 계좌이체내역서, 부가세 면세사업자용 계산서, 무통장 입금증 등
기타 지급을 증빙하는 서류	계약서, 청구서, 거래명세서, 견적서, 검수조서, 회의개최 결과보고서, 출장결과보고서 등

* 사업비카드 사용시 카드전표뿐만 아니라 구체적인 증빙서류(내부품의, 관련증빙자료)확보

3.1.7 사업비의 이자 및 집행잔액 처리

◦  사업수행기관의 장은 발생이자, 사용 잔액 중 재단 지원금에 해당하는 금액을 사업기간 종료 후 1개월 이내 재단 계좌로 입금해야 함

* 단, 사용잔액이 10,000원 미만(발생이자 포함)인 경우에는 사업수행기관의 수입으로 처리 가능

3.1.8 사업 결과보고 및 사업비 실적 보고

◦ 사업비 사용실적보고서, 결과보고서, 자체성과평가보고서, 회계감사 검증보고서 등의 양식은 「부록. 주요서식」 참조

3.1.8 정산시 주요 점검사항

구 분		점검항목	예	아니오	점검(증빙)자료
인건비	사업기간 외 집행	협약기간외의 집행여부
	비참여원 집행	참여원이 아닌 인력에게 출장여비, 인건비 등의 지급여부
	증빙불비	인건비, 자문료, 강사료 등 개인별 계좌이체 등 실지급액의 확인여부
	증빙 불인정	객관적인 증빙서류로 인정할 수 없는 경우의 확인여부
	기타
직접비	미반납 사용잔액	사업기간 종료 후 잔액의 반납여부
	종료 2월 이내 집행	기자재 등의 사업종료 2월 이내 집행여부
	목적외 집행	사업목적 및 내용과 관련 없는 경비의 집행여부
	개인성 경비	사업목적이외의 개인적인 용도 집행여부
	간접비성 경비	직접비 집행 중 간접비성 경비 해당여부
	기타
위탁 사업비	기타	위탁사업체결 및 협약종료후 잔액 등 보고여부
간접비	기타
공통	미사용 발생이자	수행사업, 위탁사업 등 사업기간 중 발생된 이자의 반납여부
	초과집행	인건비, 위탁사업비, 간접비, 사업수당 등의 미승인 및 초과집행 여부
	신설집행	위탁사업비, 인건비 등의 미계상 및 미승인 집행여부
	기타	자체발생수익금 처리여부 등

3.2 사업비 편성 및 집행 기준

3.2.1 세목별 주요 사용 내용

구 분		사 용 내 용	비 고
비목	세목
직접비	사업장비 ･ 재료비	□해당 사업기간 종료 2개월 이전에 구입이 완료(기기·장비가 도착되어 검수완료)되어 해당사업에 사용할 수 있는 기기･장비와 부수기자재(해당 사업수행과 관련 없는 개인용 컴퓨터는 제외) □시약･재료구입비 □전산처리 및 관리비 □시제품･시작품･시험설비 제작경비	사업비의 30% 이내
	사업 활동비	□강사료, 전문가 활용비, 프로그램 개발비 □당해 사업과제 수행을 목적으로 활용하는 시간제 근로자(아르바이트, 일용직 조사원의 경비) □사업수행과 직접 관련 있는 인쇄･복사･인화･슬라이드 제작비, 수수료 등 □도서 등 문헌구입비, □회의장 이용료, 세미나․행사 개최비, 원고료, 통역료, 번역료, 속기료, 구독료, 기술 도입비 <다음 각 목의 경우에는 계상 또는 집행할 수 없음> □(사업과 무관한) 개인성 여비, 내부차량 임차비, 차량 임차비, 유류비, 전기료, 수도료, 가스료, 사무 및 난방용 연료비, 청소비, 차량보험료, 경상피복비, 종신 학회비, 학회의 연회비, 참가비, 참여원에 대한 전문가 활용비
	사업 추진비	□참여원의 국내 출장여비 및 시내교통비, 사무용품비, 회의비(사업활동비의 회의장 사용료, 전문가 활용비 제외), 해당 사업 수행과 관련된 식대, 다과비 □사업수행에 직접적으로 연관된 기기, 비품의 구입, 유지비용 등 사업환경유지비 <다음 각 목의 경우에는 계상 또는 집행할 수 없음> □회의와 관련 없는 식대, 회의식비 중 점심식사
	위탁 사업비	□사업수행과제의 일부를 외부기관에게 용역을 주어 위탁 수행하는 데 소요되는 경비 (직접비, 간접비로 계상하되, 위탁사업비를 제외한 직접비의 40%를 초과할 수 없음)
간접비	간접비	□지원인력 인건비 : 사업수행에 소요되는 지원인력의 인건비 (단, 한 개 혹은 여러 연구실을 묶어 총 사업비 10억원 이상, 정산 등 행정업무 부담이 큰 경우만 해당) □능률성과급 : 사업수행기관의 장이 우수한 사업성과를 낸 참여원 및 우수한 지원인력에게 지급하는 능률성과급 □기관 공통지원경비 : 사업수행에 소요되는 기관 공통지원경비	직접비의 5% 이내

3.2.2 지원비 계상 및 세부집행 기준

□  사업장비․재료비

◦ (사용내용)

□해당사업에 2개월 이상 사용할 수 있는 기기･장비와 부수기자재(해당 사업수행과 관련 없는 개인용 컴퓨터는 제외)

□시약･재료구입비 및 시험 분석료

□전산처리 및 관리비 (전산처리 관련 재료 또는 전산소모품, 토너 등)

□시제품･시작품･시험설비 제작경비

□당초 사업계획서 작성시 신중히 검토하여 제출

◦ (불인정 항목 및 주의사항)

□사업기관의 장비․시설․공간의 임차료

□사업 참여자의 소유 기자재 및 시설사용 임차료

□소속기관 공동기자재 및 시설의 유지보수비

□타 시설․장비 사용권, 회원권 등

□사업기간 종료일 기준 2월 이내에 구입 또는 사업기간 종료 후 도착한 경우

□사업의 효용성과 무관한 범용성 기자재 구입비
(FAX, 복사기, 전화기, 카메라, LED projector등)

□해당 사업 수행과 관련 없는 경우

□사무용 컴퓨터 소프트웨어(간접비로 집행 가능)

◦ (증빙서류)

- 견적서, 세금계산서, 카드매출전표(세금계산서,계좌이체증)

- 거래명세서, 국가연구시설장비등록증, 수입신고서류(수입물품)

- 시제품․시작품의 내부제작시 전체경비의 구체적인 소요내역서

□ 사업활동비

◦ (사용내용)

□사업수행과 직접 관련 있는 강사, 전문가활용, 단기인력활용(아르바이트),

□사업수행과 직접 관련 있는 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드제작 및 수수료 등

□사업수행과 관련 있는 도서 등 문헌구입비

□사업수행과 직접 관련 있는 회의비, 세미나․행사 개최비

□사업수행과 직접 관련 있는 원고료, 통역료, 속기료, 번역료, 기술 도입비 등

◦ (불인정 항목 및 주의사항)

□사업참여자(사업책임자, 실무운영자 등)에게 원고료, 강연료 등 전문가 활용비 또는 급여 성격의 각종 수당을 지급하는 경우

□수첩 제작, 기관운영 관공비, 연하장 구입, 찬조금, 화한 구입 등

※ 예외 사항 : 사업기간 종료 후라도 최종결과보고서 인쇄·제작 등 불가피성이 인정되는 지출은 정당한 집행으로 간주함(최대 1개월 이내)

□외국자료 구입시 환율 미적용 사례

□사업과 관련이 없는 회의비, 세미나, 행사 개최비용

□연하장 구입, 찬조금, 화환, 상품권 구입 경비

□사업과 관련이 없는 공공요금, 전기료, 수도료, 가스료, 연료비, 청소비, 차량보험료, 피복관리비, 범칙금, 차량정비, 신문 구독, 명함 제작 등

◦ (증빙서류)

- 강사비, 자문료, 프로그램 개발 : 전문가 인적사항, 자문내용, 필요성 등 기재
(무통장 입금증, 소득원천징수영수증 등)

- 세미나․행사 개최비 : 개최결과보고, 카드매출전표 또는 입금증 등

- 복사 및 인쇄 등 : 견적서, 세금계산서, 카드매출전표 또는 입금증, 거래(구매)명세서, 검수조서 등

- 도서 등 문헌구입은 구입품목 목록 제출

□그 외 : 카드매출전표 또는 무통장 입금증

□  사업추진비

◦ (사용내용)

□참여원의 국내 출장여비 및 시내교통비

(소속기관의 여비 규정을 따르되, 규정이 없을 경우 공무원 여비규정 준용)

□사업수행과 관련한 사무용품비

□회의비(회의록 비치), 해당사업 수행과 관련된 식대 등

◦ (불인정 항목 및 주의사항)

□사업 참여인으로 계상되지 않은 인력의 여비 지급

□사업과 무관한 출장비(톨게이트, 주차료) 등 개인성 출장경비

□기관 여비 지급 기준의 부적정 적용

□출장기간 초과, 체재지역외 사용 등

□시내출장 및 회의는 1일 1건으로 한함

□사업수행과 무관한 이동전화요금, 명함(첩), 신문, 과태료, 신문구독료 등

□학회 주관의 세미나 등 행사경비, 강사료, 기념품 경비 등 학회 후원금 지출경비

□참여인력에 대한 급여 성질의 전문가 활용비 (회의수당, 원고료, 자문료 등)

□내부참여자에 대한 급여성질의 각종 수당 및 야근 식대

□내부품의서 또는 회의록이 없거나 사업과 관계가 없는 회의

□회의수당, 강사료, 자문비 등은 원천징수 후 금액을 직접 계좌 이체 방식으로 지급을 원칙

□사업과 관련이 없는 회의비, 세미나 참가비

□내부품의서 또는 회의록(일시, 장소, 내용 명시)이 없거나 사업과 무관한 회의비, 유흥주점·노래방 등에서 사용한 비용

□업무 추진을 입증할 수 없는 심야(10시 이후), 휴일, 휴가, 타 지역에서의 회의식대

□회의 일시와 회의 후 음료 및 다과비와 식비를 관련성 없이 지출하는 경우

□회의비를 여러 번 계상하고 실제 지출은 한 번에 계상된 금액을 사용하는 경우
(계상시 : 20,000원 × 6인 × 4식 = 48만원) ⇒ 실제 집행시 : 1식에 8만원 모두 사용

※ 회의식대는 다과비를 포함하여1일 1건(25,000원/인 이내), 다과비만 집행시 7,000원/인

◦ (증빙서류)

□여비 : 출장명령서, 출장결과보고서, 무통장 입금증 (항공료는 영수증 첨부)

(자기차량이용시 거리산정표 또는 유류비산정표, 하이패스 영수증 등 증빙자료 구비)

□회의비 및 관련식대 : 회의개최결과보고서(사진 등 구체적 증빙), 참가자 서명부, 카드매출전표 또는 무통장 입금증

□그 외 : 카드매출전표 또는 세금계산서, 무통장 입금증

□ 위탁사업비

◦ (사용내용)

□사업수행과제의 일부를 외부기관에게 용역을 주어 위탁 수행하는 데 소요되는 경비 (직접비의 40%를 초과할 수 없음)

◦ (불인정 항목 및 주의사항)

□사업수행기관은 수탁사업기관가 위탁에 관한 협약을 체결하고, 사업수행기관이 관련서류를 보관하여야 함
(사업종료 후 사업비 사용에 관한 증빙자료 사본 포함)

□직접비의 40%를 초과하여 계상 또는 집행

◦ (증빙서류) 계좌이체증명(위탁수행기관으로의 해당금액 입금증)

□ 간접비

◦ (사용내용)

□지원인력 인건비 : 사업수행에 소요되는 지원인력의 인건비

□능률성과급 : 사업수행기관의 장이 우수한 사업성과를 낸 참여원 및 우수한 지원인력에게 지급하는 능률성과급

□기관 공통지원경비 : 사업수행에 소요되는 기관 공통지원경비

□지식재산권 출원･등록비: 수행사업과 직접 관련된 지식재산권의 출원･등록에 필요한 모든 비용 또는 기술 가치평가 등 기술이전에 필요한 비용(특허유지비는 해당 지식재산권의 기술이전 가능성이 높을 경우에 한하여 최초 특허 등록기간 종료 후 2년간 집행 가능)

◦ (불인정 항목 및 주의사항)

□사업계획에서 명시가 안 된 경우

□영리기관은 지식재산권 출연등록비만 계상가능 함

◦ (증빙서류) 증빙자료는 제출 없이, 별도 보관

3.3 사업비 및 인력 변경

3.3.1 한국과학창의재단 사전 승인사항

◦ 사업 책임자 변경 (원칙적으로 불가능, 퇴사 등 부득이한 사유에 한함)

◦ 사업내용의 중대한 변경

◦ 인건비, 간접비, 사업수당의 증액 변경은 불가능함

□사전 승인 절차

- (수행기관) 변경사항 기재하여 승인요청 공문 제출

- (한국과학창의재단) 변경내용 검토 후 승인공문 발송

3.3.2 사전승인 이외의 사항(공문으로 통보)

◦ 사업비의 기간별 집행계획 변경

◦ 참여인력의 변경(사전 통보사항)

◦ 사업비 세목 간 변경

◦ 기타 경미한 사업내용의 변경

□공문 발송 시 필수 기재사항(승인 및 통보사항 공통)

1) 과제명

2) 기관명

3) 사업수행책임자

4) 변경 사유

5) 변경 전후 비교표

3.4 사업장비 등의 관리

3.4.1. 사업장비의 개요

◦ 무한상상실 장비는 정부 지원금으로 획득한 1년 이상의 내구성을 지닌 무한상상실 사업을 위한 비소비적 유형 자산’을 말하며 공공재원을 투입하였기에 비영리목적으로 활용함

※ 구매장비와 개발장비로 구분하며 구매장비는 완성된 제품으로 상업의 목적으로 제조․유통되고 있으며 도입시 어떠한 연구개발 행위도 거치지 않은 완제품 장비를 의미하고, 개발장비는 연구 목적이나 수요에 따라 고안 또는 발명해서 만든 장비(시작품, 시제품 포함)를 말함

◦ 사업 추진과 관련한 프로그램 운영, 시제품 제작 등의 용도로 사용되는 장비가 해당되며, ‘개인용 컴퓨터나 복사기 등 실제 사업 수행에 직접적, 독점적으로 사용되지 않는 기자재’는 해당되지 않음

◦ 구입가 3,000만원 이상의 장비는 ‘국가연구시설관리표준지침’을 준용하여 관리

3.4.2 장비의 소유 및 활용

◦ 정부 지원금으로 운영기관이 구매한 기기․장비 등은 운영기관의 소유로 하며, ‘무한상상실 장비 관리 항목’의 장비정보 관리‧유지와 장비의 운용이 가능토록 관리하여야 함

◦ 지원금(또는 지원금의 일부 보조)으로 구매한 모든 장비는 당 사업지원이 종료되더라도 불용, 폐기, 무상양여 등의 처분 전까지 그 활용상태를 주기적으로 점검하고 분기별 활용 실적을 무한상상정보넷 및 공문 등을 통해 재단에 제출하여야 함

3.4.3 장비의 관리

◦ 운영기관의 장은 장비가 일정기간이 지나면 빠르게 노후하거나 성능이 저하될 수 있으므로 최적의 운영여건을 유지하기 위해서 무한상상실 보유 장비의 주기적인 성능향상(업그레이드) 및 주요 부품의 교체 또는 보수를 위한 체계적인 운영관리가 이루어질 수 있도록 해야 함

◦ 디지털 제작 장비(3D프린터ㆍ펜 등) 구입ㆍ활용 시에는 전용 환기 시설을 반드시 구축하고, 무한상상실 안전매뉴얼에 따라 운영해야 함

◦ 운영기관의 장은 자체적으로 장비의 체계적 관리를 수행할 수 있도록 ‘무한상상실 장비담당관’을 지정하여 기관차원의 장비관리 효율화를 위한 임무를 책임지고 수행하여야 함

◦ 운영기관의 장은 장비 도입 시 해당 장비의 전담운영인력을 지정, 무한상상정보넷에 등록하여야 함

◦ 운영기관의 장은 ‘무한상상실 장비 관리 항목’에 따라 체계적으로 장비의 활용 실적 관리를 하여야 함

항목	내용
장비기본현황	장비명, 종류, 취득가, 취득일, 사용현황(사용/유휴/불용/폐기)
장비전담인력	담당관, 담당자(장비 전담 담당자 성명, 연락처)
장비 사용률(%)	장비 운영일수 / 운영일수 × 100
유휴/폐기정보	지원금으로 구입한 장비 중 유휴/폐기 장비의 정보

3.4.4 장비의 불용‧폐기

◦ 지원금(또는 일부 보조)으로 구매한 장비는 유휴ㆍ저활용, 불용, 폐기 등 변동사항이 발생 시 자체 규정, 내규 등의 절차에 따라 장비를 처리하고 그 변동사항(결과)을 무한상상정보넷에 입력하고 재단에 공문으로 통지하여야 함

참고	사용불능 시설장비 판정 기준

	▷ 내구연한 완료 및 천재지변(수재, 화재 등)에 의해 실효성이 상실된 시설장비 ▷ 파손ㆍAS불가 등의 사유로 인해 정상 작동이 불가능한 시설장비 ▷ 보수를 하더라도 정상적인 가동이 불가능하여 사용불능으로 판단되는 시설장비 ▷ 기능 저하 및 신뢰성 상실로 이를 위한 업그레이드ㆍ수리비용이 과다하여 최신 시설장비로 교체하는 것이 더 경제적인 시설장비 ▷ 환경적 위험과 벌금비용(폐기물 처리, 소음 등 환경기준 위반 비용 등)이 잔존가치보다 큰 시설장비 ▷ 심각한 안전 문제가 있어 기존 시설 장비를 교체하지 않을 시, 향후 재정적 손실과 대외 신뢰도에 부정적 영향을 줄 수 있는 시설장비 ▷ 주 장비에 종속되어 함께 불능 처리되어야 할 보조 장치 및 부대장비

◦ 지원금으로 구입한(또는 보조한) 장비의 매각은 불허함

3.4.5 장비의 무상양여

◦ 운영기관의 장은 저활용 유휴 장비 중 내용연수가 남아있고 본래 기능을 하고 있으나 더 이상 보유할 필요성이 없는 장비에 대하여 타 기관에 무상양여하는 것이 유용하다고 판단되는 경우 불용으로 결정하고, 수요조사를 통해 무상양여를 적극 권장하도록 노력해야 함

◦ 장비 보유 운영기관은 불용 장비를 우선적으로 무한상상실 운영기관을 대상으로 무상양여를 추진하여야 하며, 이 경우 해당 장비를 불용처리 후 정보넷 등을 통해 공고하여 수요조사를 진행하여야 함

◦ 무한상상실 운영기관의 수요가 없는 장비는 대학 및 공공기관을 대상으로 무상양여를 자체적으로 추진하고 그 결과를 재단에 공문을 통해 통보하여야 함

◦ 무상양여에 소요되는 비용은 이전요청기관의 부담을 원칙으로 함

부록. 주요서식

	1. 무한상상실 운영기관 협약서 2. 협약변경 신청공문 서식 3. 사업비 집행 증빙 서식 4. 고객 만족도 조사지

【별지 제1호】 운영기관 협약서
「무한상상실 개설․운영」 운영기관 협약서(단년도)

(한국과학창의재단과 기관과의 협약용)

□ 사업명 및 사업비

과 제 명	사 업 비(천원)
000	000

□ 사업기간 : 협약체결일로부터 ~ 20XX년 00월 00일

□ 협약당사자 (갑) : 한국과학창의재단 이사장

(을) :

(병) : 사업책임자

위 20XX년 무한상상실 개설․운영 사업(이하 ‘사업’) 수행에 관하여 (갑)과 (을)은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(사업목표 등) 본 협약은 붙임의 ‘20XX년 무한상상실 개설․운영 사업계획서’(이하 ‘사업계획서’이라 한다)의 사업목표 및 내용과 같다.

제2조(사업의 수행) (을)과 (병)은 당해 위탁사업 수행의 종합적인 권한과 책임을 갖고 붙임의 사업계획서에 따라 성실히 수행하도록 하여야 한다.

제3조(사업비의 지급) (갑)은 (을)에게 다음과 같이 사업비를 지급한다.

(가) 제1차 : 협약체결 직후	천원(60%)

(나) 제2차 : 20XX년 10월중(중간보고 후)	천원(40%)

다만, 본 협약서 제5조 내지 제6조에 따라 협약이 변경 또는 해약되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

제4조(사업비의 관리) ① (을)은 단위사업별로 회계관리 사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다. 다만, 2개 이상의 단위사업을 동시에 수행할 경우에는 이를 통합하여 관리할 수 있되, 각 단위사업별로 지급 받고 사용한 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 하여야 한다.

② (을)은 수탁사업의 시행에 따른 세부사업비의 관리를 위해 그에 필요한 사항을 정하여 (갑)의 승인을 얻은 후 운용할 수 있다.

제5조(협약의 변경) (갑)은 과학기술정보통신부 또는 (을)로 부터 요청이 있거나 필요하다고 판단되는 경우에는 협약사항을 변경할 수 있다.

제6조(협약의 해약) ① (갑)은 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에는 협약을 해약할 수 있다.

1. (을)이 부도, 기관 폐쇄 등의 사유로 사업을 수행할 수 없다고 판단할 때

2. (을)이 중대한 협약위반으로 사업을 계속 수행하기 곤란할 때

3. (을)이 사업 수행을 포기할 때

② 제1항의 규정에 의하여 협약이 해약되었을 경우에는 (을)은 이미 지급한 사업비에서 실제 사용한 비용을 제외한 금액을 즉시 (갑)이 지정하는 관리계좌에 이체하여야 한다.

제7조(사업비 사용실적 보고 등) ① (을)은 사업비 사용실적을 사업이 종료한 날로부터 2개월 이내에 (갑)에게 보고하여야 한다. 동 보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제1조의 사업계획서와 그 집행실적과의 대비표

2. 사업수행기관의 자체 회계감사 의견서

② (갑)은 제1항의 보고에 대한 검토확인을 위하여 필요한 경우 소속 직원으로 하여금 (을)에게 제4조에 의한 별도 계정원장 및 증빙서류를 제출토록 하여 열람하게 하거나 그 사본을 제출하게 할 수 있으며, (을)은 이에 협조하여야 한다.

③ (을)은 사업 종료 후 발생하는 사업비의 잔액과 사업기간 중 발생한 이자를 사업종료후 1개월 이내에 (갑)이 지정한 관리계좌에 입금하여야 한다.

제8조(자료의 제출요구 등) ① (갑)은 필요한 경우 (을)에게 사업에 관한 업무 처리사항을 보고하게 하거나 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

② (갑)은 소속 직원으로 하여금 제1항의 규정에 의하여 제출 받은 자료의 적정성을 현지에서 확인토록 할 수 있으며, 이때 (을)은 협조하여야 한다.

제9조(사업성과의 활용) (을)은 사업성과가 활용될 수 있도록 사업수행 중에 얻은 주요 성과를 DB화 하고 홍보하는 등 사업성과 확산에 필요한 조치를 하여야 한다. 또한 (갑)은 필요한 경우에는 (을)로 하여금 최종보고서를 배포케 할 수 있다.

제10조(사업홍보 및 지적재산권 등의 귀속) 당해 과제수행의 성과로 취득되는 지적재산권, 보고서 판권, 사용권(온라인사용권 포함) 등은 한국과학창의재단과 공동 소유로 하며 과학기술정보통신부 및 재단 후원을 명시하여야 한다.

제11조(수행기관의 참여·협조)

①(을)과 (병)은 과제수행기관 대상의 현장실사, 사업평가, 정산 등에 적극 협조하여야 한다.

②관련부문에 재단과의 공동기획에 적극 협조하며, 재단이 주관하는 사업설명회, 워크숍, 대한민국과학창의축전, 과학창의연례컨퍼런스 등에 적극적으로 참여 또는 협조 하여야 한다.

제12조(관계법령의 준수) (을)은 사업을 수행함에 있어서 관련 법규 및 규정을 성실히 준수하여야 한다.

제13조(해석) 본 협약서의 해석상 의문이 있을 경우에는 (갑)의 해석에 따른다.

20XX년 00월 00일

본 협약서는 2통을 작성하여 (갑)과 (을)이 각각 1통씩 보관한다.

붙 임 : 1. 사업계획서 1부.
2. 사업비 지원 신청서 1부.
3. 사업자등록증, 법인등기부등본 또는 고유번호증 사본 1부.
4. 법인인감증명서 또는 관보(학교법인 및 관공서의 경우) 1부.
5. 사용인감계(법인인감과 협약서에 사용할 인감이 다른 경우) 1부.

※ 사업계획서를 제외한 상기첨부서류는 필요시 전자협약서로 대체 될 수 있음

(갑)	주 소 :	서울특별시 강남구 선릉로 602 (삼성동, 삼릉빌딩)
	기관명 :	한국과학창의재단
	대표자 :		(인)
(을)	주 소 :
	기관명 :
	대표자 :		(인)

【별지 제1호】 사업신청서

「20XX년 무한상상실 운영」(단년도)

사업신청서

사  업  명

20XX년도 무한상상실 개설ㆍ운영 사업

협 약 기 간

20   년   월   일 ～ 20   년   월   일

사   업  비

총             원(￦                 )

재단지원금

매칭자금(자체)

매칭자금(외부)

원

원

예 산 구 성

구분			계	인건비	장비유지비	재료비	사업활동비	사업추진비	위탁사업비	간접비
전체사업비
	재단지원금
		무한상상실
		이동형무상실
		메이커커뮤니티
		행사개최지원
	매칭자금(자체)
	매칭자금(외부)

주 관 기 관

기 관 명

소 재 지

대 표 자

사업책임자

성    명

연 락 처

부 서 명

이 메 일

사업수행자

성    명

연 락 처

부 서 명

이 메 일

운영인력

전임(상근)

명

겸임 또는 비상근

명

강    사

전담

명

외부

명

인 프 라

전용면적

㎡

장비보유 수

개

본 사업에 관해 관계규정 등 제반사항을 준수하면서 성실히 수행하고자 사업계획서를 제출합니다.

붙임 : 사업계획서 1부.

20XX년   월   일

주관기관장 :               (인)

한국과학창의재단 이사장 귀하

【별지 제2호】 사업계획 변경요청서
「무한상상실 개설․운영」 사업계획 변경요청서

주관기관명

변경횟수

￭ 사업계획변경(    회)

￭ 사업비 변경 (    회)

협 약 기 간

20   년   월   일 ～ 20   년   월   일

변 경 유 형

사업계획 변경 (  )

사업비 비목/세목 변경 (  )

변 경 내 용

(사업계획)

￭사업계획 변경 개요

변경 전

변경 후

변 경 내 용

(사업예산)

￭예산변경 개요 :

￭사업비 변경 총괄표

비 목	세목	변경 전		변경 후		비고 (증감, 변경사유)
		집행내역	예산(천원)	집행내역	예산(천원)

* 상기 표는 변경하여 작성 가능하나, 변경전후(증감)와 변경사유를 확인할 수 있도록 구체적으로 작성 바람

변 경 사 유

별첨. 수정사업계획서 또는 사업비 변경내역서(변경 관련 세부자료)  1부.

20   년   월   일

주관기관장 :               (인)

한국과학창의재단 이사장 귀하

※ (참고) 사업계획변경 제출서류

변경구분	제출서류	비고
공통 제출서류	- 변경신청 공문 - 사업계획변경신청서 - 변경전후 대비표 - 관련 증빙서류
사업목표 및 내용 변경	- 사업계획서(변경분) - 변경전후의 비교표 - 관련 증빙서류
참여기관 변경	- 참여기관 변경사유 - 권리의무 승계확약서 - 참여기관 포기각서 - 사업계획서(변경분) : 참여확약서, 상호협약서, 역할분담 및 예산집행계획 변경사항 등
사업비 변경	- 사업비 변경신청서 (비목별 소요명세서 포함)
총괄책임자 변경	- 변경 사유 - 주요 인적사항 (이력서 및 최근 5년간 실적포함)
참여인력 변경	- 참여인력 현황 - 예산집행계획 변경사항 등
대표자, 상호, 주소변경	- 법인등기부등본 - 사업자등록증 사본
사업비 관리계좌 변경	- 변경사유 - 사업비 관리계좌 - 변경 후 통장 사본

【별지 제3호】 사업비 집행 관련 서식
「무한상상실 개설ㆍ운영」 사업비 집행증빙 서식

	참 고 자 료
※ 사업운영기관 자체에 양식이 없을 경우 아래 양식사용, 단, 자체 양식을 사용하는 기관은 각 양식의 항목을 반드시 포함 ① 회의 및 세미나 개최결과보고서 ② 출장결과보고서 ③ 전문가 활용 내역서

1	회의 및 세미나 개최결과보고서

결재

제 목
일시/장소
참 석 자
개최목적	세부적으로 기술
주요내용	세부적으로 기술
지출비용
비 고	* 세미나 개최 결과는 사진 및 세부적인 내용 첨부

2	출장 결과 보고서

결재

제 목
기 간
출장지역
출 장 자
목 적	세부적으로 기술
주요 내용	세부적으로 기술
지출 비용
비 고

3	전문가 활용 결과 내역서

결재

목적 및 사유	세부적으로 기술
활용내역	세부적으로 기술
활용기간
전 문 가 인적사항	성 명
	소속 및 직위
활용결과	세부적으로 기술
지급비용
비 고

【별지 제4호】 사업결과보고서식
「무한상상실 개설ㆍ운영」 자체평가보고서, 회계감사검증보고서

	참 고 자 료
① 사업운영기관 자체평가보고서 ② 사업비 회계감사검증보고서 (기관장 직인, 감사 서명) ③ 입금내역서 ④ 정산보고서

1	사업운영기관 자체평가보고서

사업운영기관의 자체평가보고서

과 제 명
사업수행 기관명
사업수행 책임자	소속부서명			직위
	성 명			전공
사 업 비	원			참여 인력	명
사업기간	년 월 일부터 년 월 일까지
평 가 일	년 월 일
평 가 자	소 속
	직 위
	성 명		(인)

1. 사업비 정산보고서

(단위 : 원)

구 분 비 목		당초계획 (A)	사용금액 (B)	증 감 (A-B)	증감사유
직접비	사업장비 재료비
	사업활동비
	사업추진비
	위탁사업비
간 접 비
합 계

※ 비목은 당초에 재단과의 협약서의 예산항목을 기준으로 합니다.

2. 자체 평가 보고서

※ 세부평가는 수행사업에 대한 계속성여부와 종합적인 성과를 측정하여 차기연도 사업예산 수립에 반영하는 자료로 활용되오니 가시적이고 정량적으로 작성 요망

□ 사업목표와 달성도

□ 사업개발 추진체계의 적절성

□ 사업수행성과

□ 사업결과의 사회경제적 파급효과

□ 차기사업계획 또는 개선방안

* 필요시 관련자료 별첨

2	사업비 회계감사검증보고서

사업비회계감사검증보고서

1. 과제 개요

과 제 명
사 업 책 임 자	(소 속) (성 명)
사 업 기 간	20 . . . ～ 20 . . . ( 년 월)
참 여 기 업

2. 사업비 사용실적 회계검사 및 검증결과

〔사용잔액 반납액〕

재단지원금	사용금액	사용잔액	이자	총 반납액	반납일과 근거번호
원	원	원	원	원	반납일 : 근거번호 :

주) 1. 사용잔액 = 재단 지원금에 대한 사용 후 잔액
2. 이자 = 사업기간중 발생이자 + 사업종료후 재단 반납일까지 발생이자
3. 이체일은 집행잔액을 한국과학창의재단 계좌에 이체한 날짜를 기재함
4. 근거번호는 집행잔액을 이체한후 동 내용을 통보한 문서번호를 기재함

〔자체 회계검사 및 검증후 반납액〕

회계검사 및 검증후 부적정 사용금액	반납일과 근거번호
원	반납액 : 원 이체일 : 근거번호 :

3. 부당 또는 부적절한 회계처리 검증내역 및 조치결과

구 분 비 목	부적정 사용내역	부적정 사용금액	비 고

4. 회계검사･검증결과에 대한 종합의견

【종합의견】

상기 과제의 사업비 사용실적에 대한 회계검사･검증결과를 보고합니다.

20   년     월    일

사업운영기관장 :          (인)

회계검사부서장 :          (인)

한국과학창의재단 이사장  귀 하

※ 사업운영기관장의 (인)에는 협약시 사용한 도장을 날인하여야 함.

※ 회계검사부서장이란 주관기관의 재산상황과 업무집행을 감사하는 감사를 말한다.

3	입금내역서

◦ 수신 : 한국과학창의재단 집행잔액 입금내역서
기 관 명					지원연도
사 업 명		20XX년 무한상상실 개설ㆍ운영
과 제 명
과제 유형	연구책임자	연구기간	입금내역(단위: 원)
			사용잔액	정산잔액	발생이자	기타	합계
합계
집행잔액(사용잔액+정산잔액) - 사용잔액 : 사업 종료에 따라 운영기관이 사업비를 사용한 후 남은 사업비비 금액 - 정산잔액 : 주관사업기관의 자체정산 또는 전문기관 정산 등에 의해 부당집행분으로 확정된 금액 발생이자(기간중+기간후이자) - 사업기간중 이자 : 사업수행기간중 사업비관리계좌에서 통상적으로 3개월마다 발생하는 이자, 재투자하거나 직접비에 산입하여 사용하지 않고 반납하는 금액 - 잔액으로 발생한 이자 : 사업기간종료후 사용실적보고서(잔액반납)전까지 연구비잔액으로 발생한 이자, 잔액에 의한 발생이자는 반납하여야 함. ◎ 입금담당 연락처 : 성명( ) 연락처( ) 입금일자( )
입 금 증(첨부)

4	정산보고서

정산 보고서

사업명 :

기  관 :

☞ 작성시 유의사항

▪사업실적을 검토할 수 있도록 비목별 세부사용내역을 정확히 기재

▪비목별 일자순으로 정렬, 집행일자는 영수증(청구서)일자로 통일

▪비목은 혼합하여 작성하지 말 것(영수증 1건당 1줄 생성)

▪영수증, 결의서 등 증빙자료는 재단의 요구가 있을 때 제출할 수 있도록 관리
- 증빙자료에 순번을 부여하여, 영수번호 자리에 기재할 것

(1) 비목별 예산･집행 실적 대비표

비목/세목		지원금			매칭자금(자체투입금)			집행증감 및 잔액발생 사유
		당초계획(A)	사용금액(B)	증감 (A-B)	당초계획(C)	사용금액(D)	증감 (C-D)
직접비	인건비
	사업장비․재료비
	사업활동비
	사업추진비
	위탁사업비
	소 계
간접비	간접비
	소 계
합 계

☞ 작성시 유의사항

▪예산 비목간 변경을 재단으로부터 승인받은 경우에는 사유란에 공문 번호와 일자 표시

(2) 비목별 사용 내역(재단지원금)

사업비 (총액)

-

[직 접 비]

1) 사업장비, 재료비

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호	영수번호
20XX-06-30	680,000	◦ “8월 청소년캠프” 체험키트 구입 - 납품업체 : - 구입단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	6
20XX-09-01	3,000,000	◦ “10월 청소년캠프“ 천체관측장비 임차 - 납품업체 : - 임차단가*수량 : - 임차기간 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	7
20XX-10-03	40,000	◦ “10월 청소년캠프용” 시약 구입 - 구입목적 : - 납품업체 : - 구입단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	8
계	3,720,000

☞ 사용내역 작성시 유의사항

▪ 기자재 및 장비 : 내역-납품업체-구입단가*수량

▪ 기자재 임차비 : 내역-납품업체-임차단가*수량-임차기간

▪ 전산소모품비 : 내역-구입목적-납품업체-구입단가*수량

2) 사업활동비

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호	영수번호
20XX-08-31	10,000	◦ “8월 청소년캠프” 현수막 구입 - 납품업체 : - 구입단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	9
20XX-05-13	500,000	◦ “8월 청소년캠프” 인쇄비 - 인쇄목적 : - 납품업체 : - 인쇄단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	10
20XX-08-21	150,000	◦ “8월 청소년캠프” 인화비 - 인쇄목적 : - 납품업체 : - 인쇄단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	11
계

☞ 사용내역 작성시 유의사항

▪ 국내외 전문가 활용비 : 내역-활용목적-전문가명-활용기간

▪ 홍보비 : 내역-홍보목적-홍보업체-계약단가-계약기간

3) 사업추진비

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호	영수번호
20XX-04-28	150,000	◦ “8월 청소년캠프” 국내여비 - 출장목적 : - 출장지 : - 출장자 : - 출장기간 :	012-3456-7890 (은행명/계좌명)	12
20XX-09-16	3,000,000	◦ “10월 청소년캠프” 세미나 개최비 - 목적 : - 장소 : - 참석자 : - 날짜 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	13
20XX-09-06	100,000	◦ “8월 청소년캠프” 다과비 - 목적 : - 장소 : - 참석자 : - 날짜 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	14

☞ 사용내역 작성시 유의사항

▪ 여비 : 내역-출장목적-출장지-출장자-출장기간

▪ 사무용품비 : 내역-납품업체-구입단가*수량

▪ 인쇄비 : 내역-인쇄목적-납품업체-인쇄단가*수량

▪ 인화비 : 내역-인화목적-납품업체-인화단가*수량

▪ 공공요금 : 내역-공공회사-요금명-비고

▪ 수수료 : 내역-수수료목적-발송처

▪ 회의비, 다과비, 식대, 세미나 개최비 : 내역-목적-장소-참석자-날짜

▪ 문헌구입비 : 내역-도서명-구입단가*수량

[간접비]

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호	영수번호
20XX-07-01	300,000		123-456-789-10 (법인카드/지출일시)	15
계	300,000

☞ 사용내역 작성시 유의사항

▪ 인센티브 : 내역-지급처-지급기준

(3) 비목별 사용 내역(자체투입금)

사업비 (총액)

-

[직 접 비]

1) 인건비

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호
20XX-06-30	680,000
20XX-09-01	3,000,000
20XX-10-03	40,000
계	3,720,000

2) 사업장비, 재료비

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호
20XX-06-30	680,000	◦ “8월 청소년캠프” 체험키트 구입 - 납품업체 : - 구입단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
20XX-09-01	3,000,000	◦ “10월 청소년캠프“ 천체관측장비 임차 - 납품업체 : - 임차단가*수량 : - 임차기간 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
20XX-10-03	40,000	◦ “10월 청소년캠프용” 시약 구입 - 구입목적 : - 납품업체 : - 구입단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
계	3,720,000

3) 사업활동비

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호
20XX-08-31	10,000	◦ “8월 청소년캠프” 현수막 구입 - 납품업체 : - 구입단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
20XX-05-13	500,000	◦ “8월 청소년캠프” 인쇄비 - 인쇄목적 : - 납품업체 : - 인쇄단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
20XX-08-21	150,000	◦ “8월 청소년캠프” 인화비 - 인쇄목적 : - 납품업체 : - 인쇄단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
20XX-09-06	90,000	◦ “8월 청소년캠프” 회의비 - 회의목적 : - 장소 : - 참석자 : - 날짜 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
20XX-09-06	200,000	◦ “8월 청소년캠프” 강사료 - 목적 : - 장소 : - 참석자 : - 날짜 :	012-3456-7890 (은행명/계좌명)
20XX-09-06	200,000	◦ “8월 청소년캠프” 강사료 - 목적 : - 장소 : - 참석자 : - 날짜 :	09-87-654-321 (은행명/계좌명)
20XX-09-21	900,000	◦ “10월 청소년캠프” 관련 도서 구입 - 도서명 : - 구입단가*수량 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
계

4) 사업추진비

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호
20XX-04-28	150,000	◦ “8월 청소년캠프” 국내여비 - 출장목적 : - 출장지 : - 출장자 : - 출장기간 :	012-3456-7890 (은행명/계좌명)
20XX-09-16	3,000,000	◦ “10월 청소년캠프” 세미나 개최비 - 목적 : - 장소 : - 참석자 : - 날짜 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
20XX-09-06	100,000	◦ “8월 청소년캠프” 다과비 - 목적 : - 장소 : - 참석자 : - 날짜 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)

5) [간접비]

집행일자	지출금액	사용내역(수령인)	지급구좌번호
20XX-07-01	300,000	◦ “8월 청소년캠프” 사업홍보비 - 홍보업체 : - 계약단가 : - 계약기간 :	123-456-789-10 (법인카드/지출일시)
계	300,000

【별지 제5호】 이용자 만족도 조사지
「무한상상실 개설ㆍ운영」 이용자 만족도 조사지

무한상상실 운영 프로그램 참여자 설문 조사지

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 전 국민이 상상력과 아이디어를 발휘, 구현할 수 있는 과학문화 환경 조성을 위하여 무한상상실을 운영하고 있습니다. 본 설문조사는 무한상상실 프로그램을 참여한 분들의 만족도에 대한 설문조사입니다. 귀하께서 응답해주시는 설문내용은 통계 분석 목적으로만 사용되며, 설문조사를 통해 무한상상실을 더욱 효과적으로 운영하는 방안을 마련하고자 하오니 성실한 답변을 해주시면 감사하겠습니다.

* 아래의 질문을 읽고 해당하는 내용의 번호에 √ 표시하여 주십시오.

[ 응답자 기초 정보 ]

참여 프로그램
연 령	① 초등학생 (1~3학년) ② 초등학생 (4~6학년) ③ 중학생 ④ 고등학생 ⑤ 대학생 ⑥ 일반인 ⑦ 기타 ( )
성 별	① 남성 ② 여성

1. 프로그램

1) 무한상상실 프로그램은 수업 주제에 맞는 내용으로 충실하게 진행되었습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

2) 무한상상실 프로그램의 내용이 자신의 수준에 적합하였습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

3) 무한상상실 프로그램을 통해 해당 분야의 지식과 능력을 키울 수 있었습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

4) 무한상상실 프로그램 내용이 일상생활에 활용되었습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

2. 시설 및 장비

1) 무한상상실은 편리하게 이용할 수 있는 위치에 있습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

2) 무한상상실 프로그램 시설 및 장비 이용이 편리하였습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

3) 무한상상실 프로그램 시설 및 장비가 프로그램 내용에 적절하였습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

4) 무한상상실 프로그램 시설 및 장비가 충분하였습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

3. 강사 및 자료

1) 무한상상실 프로그램 강사는 강의내용을 효과적으로 전달했습니까?(강의방법, 전달방식 등)

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

2) 무한상상실 프로그램 강사는 수업준비를 철저히 하였고 충분한 지도능력을 갖추었습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

3) 무한상상실 프로그램 강의 자료 및 안내 자료를 충분하게 제공되었습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

4) 무한상상실 프로그램 강의 자료 및 안내 자료의 내용이 적절하였습니까?

①  매우 그렇지 않다    ② 그렇지 않다    ③ 보통이다    ④ 그렇다    ⑤ 매우 그렇다

4. 기타 제안

앞으로 무한상상실이 전 국민의 창의적 아이디어 실현 공간이 될 수 있도록 하기 위해서

개선되고 보완되어야 할 점이 무엇인지 다양한 의견을 제시하여 주십시오.

(프로그램 내용 / 장비 및 시설 / 강사 필요 역량 등)

설문에 참여해주셔서 감사합니다.

무한상상실 이용자 만족도 통계(X월)
[기관명]

[프로그램명]

기본 인적 정보	연령계층	합계	초등1~3	초등4~6		중학생	고등학생	대학생		일반인	기타
		11	3	2		3	3
	성별	합계			남성				여성
		11			4				7

[문항통계]
분류			5	4	3	2	1	합계
1. 프로그램	1) 내용 충실도		7	3	1			11
	2) 내용 난이도		6	4	1			11
	3) 내용 효율도		8	2	1			11
	4) 내용 활용도		7	3	1			11
2. 시설 및 장비	1) 장소 접근도		9	2				11
	2) 이용 용이도		10	1				11
	3) 장비 적합도		10	1				11
	4) 장비 충분도		10	1				11
3. 강의 및 안내 자료	1) 강사 능력도		10	1				11
	2) 강사 충실도		10	1				11
	3) 자료 충분도		10	1				11
	4) 자료 적절성		10	1				11
	총점		535	84	12	0	0	631
						만족도 : 4.7803