2025년도 상반기

예천군하수도사업 업무상황 설명서

1.		기관 현황

(1) 설립 근거

○ 근거법령 :「지방공기업법」제5조

○ 설립조례 :「예천군 상·하수도사업 지방공기업 설치조례」

(2018.08.13. 조례 제2306호)

○ 설립일자 : 2019년 1월 1일

○ 원시자본 : 46,888백만원 (2018.12.31.현재 자산평가액)

(2) 주요 기능 및 역할

○ 예천군 상·하수도사업 지방공기업 설치조례 제2조(사업의 범위)

· 공공하수도사업 및 그에 부대되는 사업

· 공공하수처리시설 및 그에 부대되는 사업

· 그 밖에 이와 유사한 사업 및 그에 부대되는 사업

기관(조직)별		주 요 담 당 업 무
맑은물사업소	하수도팀	▪하수도정비기본계획 수립 및 변경관리 ▪공공하수처리장 및 관거사업, 유지관리 ▪하수도사용료 부과․징수
	관리팀	▪하수도사업특별회계 예산편성 및 결산 ▪하수도사업 (시설공사, 용역, 물품 등) 집행

(3) 조직 기구도

관 리 자 (예천군 부군수)
기업출납원 (맑은물사업소장)
하수도팀			관리팀
시설6급(팀 장)			행정6급(팀 장)
시설6급(주무관)			위생7급(주무관)
시설8급(주무관)			행정8급(주무관)
환경8급(주무관)			행정9급(주무관)

(4) 하수처리시설 현황

지구명	대 상 시설명	위 치	시설용량 (톤/일)	설치년도
총 계		16개소	9,858
소 계		2개소	8,000
공 공 하 수 처리장	예천	예천읍 상동리 57-3	7,500	2005년
	읍부	용궁면 읍부리 7-5	500	2011년
소 계		14개소	1,858
마 을 하 수 처리장	감천문화	감천면 덕율리 103-1	30	2000년
	포리	감천면 포리 833	200	2010년
	낙상2	풍양면 공덕리 681	450	2011년
	삼강	풍양면 삼강리 152-1	350	2019년
	도촌	효자면 도촌리 493-1	50	2012년
	마전	지보면 마전리 343-2	230	2016년
	암천	지보면 암천리 349-2	45	2004년
	담암	호명면 담암리 274	45	2005년
	향석	용궁면 향석리 34-12	48	2007년
	신음	개포면 신음리 41	100	2019년
	신풍	지보면 신풍리 565	70	2019년
	읍실	은풍면 오류리 62	90	2019년
	우망	풍양면 우망리 1052	70	2021년
	오천2	호명면 오천리 174	80	2022년

(5) 하수슬러지 건조시설 현황

시설명	위 치	시설용량 (톤/일)	처리공법	활용방안	설치 년도
하수슬러지 건조시설	예천읍 상동길 49-50	18 (탈수케잌 기준)	직/간접 가열식 벨트건조기	-시멘트 제조원료 -연료탄제조(슬러지) -화력발전 혼소연료	2021

(6) 하수도 업종별요율표

업 종	단계(㎥/월)	㎥당 단가(원)
가정용	1 ∼ 20	221
	21 ∼ 40	332
	41이상	443
일반용	1 ∼ 50	565
	51 ∼ 100	734
	101 ∼ 300	960
	301이상	1,243
대중탕용	1 ∼ 300	392
	301 ∼ 500	510
	501이상	667
산업용	㎥당	413

2.		사업 현황

2-1		도시침수 대응사업

(1) 예천1배수분구 도시침수대응사업

○ 위    치 : 예천읍 시가지 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 정비 L=2.549km 빗물펌프장 1개소(Q=480㎥/분)

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

○ 사 업 비 : 19,057백만원(국비 11,416, 기금 4,585, 군비 3,056)

○ 추진상황

∙ 2021.  5월 : 기본 및 실시설계용역 시행

∙ 2021.  9월 : 하수도정비대책 수립 및 제출(대구지방환경청)

∙ 2023. 12월 : 지방건설기술심의 및 재원협의

∙ 2024.  2월 : 원가심사 의뢰

∙ 2024.  7월 : 공사 착공(총괄, 1차)

○ 향후계획

∙ 2026. 12월 : 공사 준공

2-2		하수관로 정비사업

(1) 유천처리구역 외 하수관로 정비사업

○ 위    치 : 예천읍, 유천면, 용문면, 보문면 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 L=23.09㎞, 배수설비 580가구

○ 사 업 비 : 19,258억원(국비13,124, 기금3,680, 군비2,454)

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(6년간)

○ 추진상황

∙ 2021.  5월 : 기본 및 실시설계 용역 시행

∙ 2021.  8월 : 공사 발주 및 착공(총괄 및 1차공사)

∙ 2025.  6월 : 6차 공사 착공

○ 향후계획

∙ 2026. 12월 : 공사 준공(총괄)

(2) 가야처리분구 하수관로 정비사업

○ 위    치 : 용궁면 가야리 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 L=1.578㎞, 배수설비 35가구

○ 사 업 비 : 2,946백만원(국비 1,763, 기금 710, 도비 141, 군비 332)

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3년간)

○ 추진상황

∙ 2023. 10월 : 하수도분야 국고보조사업 예산확정

∙ 2025.  3월 : 대구지방환경청 재원협의 완료

○ 향후계획

∙ 2025.  7월 : 경상북도 원가심사 완료

∙ 2026. 11월 : 공사 발주 및 착공(총괄 및 1차공사)

2-3		하수처리장 설치사업

(1) 지보 농어촌마을 하수도 정비사업

○ 위    치 : 지보면 지보리 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 L=2.92km, 하수처리장 Q=60㎥/일

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(6년간)

○ 사 업 비 : 7,392백만원(국비 4,838, 기금 1,270, 도비 250, 군비 1,034)

○ 추진상황

∙ 2021.  5월 : 기본 및 실시설계용역 시행

∙ 2023.  7월 : 재원협의 완료

∙ 2024.  4월 : 관련부서 협의 및 원가심사 완료

∙ 2024. 11월 : 공사 착공

○ 향후계획

∙ 2026. 12월 : 공사 준공(총괄)

(2) 괴당 농어촌마을 하수도 정비사업

○ 위    치 : 풍양면 괴당리, 고산리 일원

○ 사 업 량 : 하수처리장 Q=45㎥/일, 하수관로 L=2.3km

○ 사 업 비 : 4,182백만원(국비 2,916, 기금 760, 도비 150, 군비 356)

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년간)

○ 추진상황

∙ 2020.  3월 : 기본 및 실시설계 용역 시행

∙ 2021. 11월 : 재원 협의 및 계약 원가심사 완료

∙ 2021. 12월 : 공사 발주 및 착공(총괄 및 1차 공사)

∙ 2024.  3월 : 5차 공사 착공

∙ 2024. 11월 : 종합시운전 시행

○ 향후계획

∙ 2025.  11월 : 공사 준공(총괄)

(3) 낙상1 농어촌마을 하수도 정비사업

○ 위    치 : 풍양면 공덕리 일원

○ 사 업 량 : 하수관로 L=3.5km

○ 사 업 비 : 5,054백만원(국비 2,920, 기금 1,213, 도비 234, 군비 687)

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

○ 추진상황

∙ 2022.  12월 : 기본 및 실시설계용역 시행

∙ 2024.  10월 : 기술자문 완료

∙ 2025.   6월 : 공사 발주

○ 향후계획

∙ 2026.   6월 : 공사 준공(총괄)

(4) 지보 한대마을 하수처리시설 개체사업

○ 위    치 : 지보면 대죽리 일원

○ 사 업 량 : 하수처리시설 개체 1식(Q=50㎥/일)

○ 사 업 비 : 3,234백만원(국비 600, 도비 40, 군비 2,594)

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3년간)

○ 추진상황

∙ 2024.  11월 : 행정절차(기술자, 원가심사 등) 이행

∙ 2024.  12월 : 공사 착공

○ 향후계획

∙ 2026.   6월 : 공사 준공(총괄)

2-4		임대형 민자사업(BTL) 추진

(1) 예천하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

○ 위     치 : 예천읍 시가지 일원

○ 규     모 : 오수관로 L=44.542km, 배수설비 3,345개소, 펌프장 8개소

유량계 8개소(고정식 3, 이동식 5)

○ 사 업 비 : 43,272백만원(민자)

○ 정부지급금 : 4,026백만원(임대료 3,440, 운영비 586)

(국비2,389, 기금620, 군비1,017)

○ 운영기간 : 2015. 6월 ~ 2035. 6월(20년간)

○ 운 영 사 : 푸른예천환경(주) 대표 박한철

○ 추진상황

∙ 2025.  4월 운영성과평가위원회 개최(2025년 1/4분기)

∙ 2025.  8월 운영성과평가위원회 개최(2025년 2/4분기)

○ 향후계획

∙ 2025. 11월 : 운영성과평가위원회 개최(2025년 3/4분기)

∙ 2026.  1월 : 운영성과평가위원회 개최(2025년 4/4분기)

3.		경리에 관한 상황

(1) 총괄현황

과 목	예산액 ①	지출액 ②	예산잔액 ①-②=③
합 계	32,809,395,340	13,593,939,530	19,215,455,810
사업예산	8,164,125,650	6,510,727,650	1,653,398,000
자본예산	24,645,269,690	7,083,211,880	17,562,057,810

(2) 사업예산 운용현황

과목						예산액	지출액	잔액
공기업(하수도)						8,162,786,650	6,510,727,650	1,652,059,000
	하수도 정비(하수도)
						3,810,646,650	2,573,900,280	1,236,746,370
		예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)
						650,260,000	281,865,000	368,395,000
			관거비
						650,260,000	281,865,000
				307
				민간이전		650,260,000	281,865,000
					307-05
					민간이전/민간위탁금	650,260,000	281,865,000	368,395,000
		하수도 정비
						3,160,386,650	2,292,035,280	868,351,370
			관거비
						1,611,944,250	1,530,125,770	81,818,480
				307
				민간이전		192,439,250	113,249,400
					307-05
					민간이전/민간위탁금	192,439,250	113,249,400	79,189,850
				308
				자치단체등이전		1,419,505,000	1,416,876,370
					308-07
					자치단체등이전/ 자치단체간부담금	1,419,505,000	1,416,876,370	2,628,630
			일반관리비
						1,548,442,400	761,909,510	786,532,890
				201
				일반운영비		1,159,108,000	667,438,310	491,669,690
					201-01
					일반운영비/사무관리비	56,688,000	25,170,000	31,518,000
					201-02
					일반운영비/공공운영비	1,102,420,000	642,268,310	460,151,690
				207
				연구개발비		389,334,400	94,471,200
					207-01
					연구개발비/연구용역비	389,334,400	94,471,200	294,863,200
	수질개선(하수도)
						4,352,140,000	3,936,827,370	415,312,630
		환경기초시설 운영
						4,352,140,000	3,936,827,370
			처리장비
						4,352,140,000	3,936,827,370
				307
				민간이전		4,352,140,000	3,936,827,370
					307-05
					민간이전/민간위탁금	4,352,140,000	3,936,827,370	415,312,630
공기업(하수도)(행정운영)
						224,162,000	104,564,190	119,597,810
	인력운영비(하수도)
						224,162,000	104,564,190
		인력운영비
						224,162,000	104,564,190
			일반관리비
						224,162,000	104,564,190
				101
				인건비		220,322,000	102,277,740
					101-01
					인건비/보수	220,322,000	102,277,740	118,044,260
				204
				직무수행경비		3,840,000	2,286,450
					204-03
					직무수행경비/특정업무경비	3,840,000	2,286,450	1,553,550
공기업(하수도)(예비비)
						1,339,000	0	1,339,000
	예비비(하수도)
						1,339,000	0
		예비비
						1,339,000	0
			예비비
						1,339,000	0
				801
				예비비		1,339,000	0
					801-01
					예비비/일반예비비	1,339,000	0	1,339,000

(3) 자본예산 운용현황

구분						예산액	지출액	잔액
공기업(하수도)(자본)						24,645,269,690	7,083,211,880	17,562,057,810
	하수도 정비(자본)
						2,237,318,070	200,372,940	2,036,945,130
		하수도 정비(자본)
						2,237,318,070	200,372,940
			건물
						255,387,070	60,512,670	194,874,400
				401
				시설비및부대비		255,387,070	60,512,670
					401-01
					시설비및부대비/시설비	250,737,070	60,512,670	190,224,400
					401-02
					시설비및부대비/감리비	4,650,000	0	4,650,000
			구축물
						1,981,931,000	139,260,270	1,842,070,730
				401
				시설비및부대비		1,869,568,000	139,860,270
					401-01
					시설비및부대비/시설비	1,869,568,000	139,860,270	1,729,707,730
				405
				자산취득비		112,363,000	0
					405-01
					자산취득비/자산및물품취득비	112,363,000	0	112,363,000
	수질개선(하수도)(자본)
						18,811,538,340	5,575,076,360	13,236,461,980
		예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료
						3,413,000,000	1,743,734,000
			기타비유동부채상환
						3,413,000,000	1,743,734,000
				612
				기타비유동부채상환		3,413,000,000	1,743,734,000
					612
					기타비유동부채상환	3,413,000,000	1,743,734,000	1,669,266,000
		하수관로(유천처리구역 외 하수관로 정비사업)
						6,976,114,610	1,640,860,030	5,335,254,580
			건설중인자산(유형자산취득)
						6,976,114,610	1,640,860,030
				401
				시설비및부대비		6,976,114,610	1,640,860,030
					401-01
					시설비및부대비/시설비	6,318,914,610	1,105,040,030	5,213,874,580
					401-02
					시설비및부대비/감리비	655,200,000	535,320,000	119,880,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
		하수관로(가야처리분구 하수관로 정비)
						319,800,000	11,067,000	308,733,000
			건설중인자산(유형자산취득)
						319,800,000	11,067,000
				401
				시설비및부대비		319,800,000	11,067,000
					401-01
					시설비및부대비/시설비	257,800,000	11,067,000	246,733,000
					401-02
					시설비및부대비/감리비	60,000,000	0	60,000,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비	2,000,000	0	2,000,000
		하수처리장 설치(지보 농어촌마을 하수도 정비)
						4,516,622,760	1,185,589,390	3,331,033,370
			건설중인자산(유형자산취득)
						4,516,622,760	1,185,589,390
				401
				시설비및부대비		4,516,622,760	1,185,589,390
					401-01
					시설비및부대비/시설비	4,014,622,760	1,019,975,390	2,994,647,370
					401-02
					시설비및부대비/감리비	500,000,000	165,164,000	334,836,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비	2,000,000	450,000	1,550,000
		하수처리장 설치(낙상1 농어촌마을 하수도 정비)
						560,800,000	0	506,800,000
			건설중인자산(유형자산취득)
						560,800,000	0
				401
				시설비및부대비		560,800,000	0
					401-01
					시설비및부대비/시설비	4,441,800,000	0	4,441,800,000
					401-02
					시설비및부대비/감리비	60,000,000	0	60,000,000
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비	5,000,000	0	5,000,000
		하수도시설 현대화
						3,079,200,970	993,825,940	2,085,375,030
			건설중인자산(유형자산취득)
						3,079,200,970	993,825,940
				401
				시설비및부대비		3,079,200,970	993,825,940
					401-01
					시설비및부대비/시설비	2,903,700,970	818,325,940	2,085,375,030
					401-02
					시설비및부대비/감리비	175,500,000	175,500,000
	도시침수대응
						3,596,413,280	1,307,762,580	2,288,650,700
		도시침수대응
						3,596,413,280	1,307,762,580
			구축물
						3,596,413,280	1,307,762,580
				401
				시설비및부대비		3,596,413,280	1,307,762,580
					401-01
					시설비및부대비/시설비	3,294,413,280	1,107,106,660	2,187,306,620
					401-02
					시설비및부대비/감리비	300,000,000	200,275,920	99,724,080
					401-03
					시설비및부대비/시설부대비	2,000,000	380,000	1,620,000